문서번호	설비부-587
결재일자	2019.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	01/15 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

2019. 01

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고에 대한 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 건설사업 관리단에서 실정보고서를 제출하여 관련내용을 검토하여 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : ㈜동성엔지니어링, *********

□  공 정 률 : 14%(현장 인근도로 가로등 설치 준비)

2		관련근거

□ 남산예장 감리 제2019-4(`19.1.3) : 건설사업관리단 실정보고서 제출

3		실정보고 내용

□  기존 지하차도(U type) 가로등 설치 변경

○ 변경사유 : 기존 지하차도와 남산터널 연결 신설도로에 메탈등으로                설계 반영 되었으나, 관리기관(서부도로사업소)에서 기존 지하차도 가로           등을 LED로 교체하여, 신설도로 4개소에만 LED교체(1등용→2등용)

○ 현황사진 및 변경도면

현황사진	당초도면	변경도면

□  소방재난본부 후문 주차 차단기 1개소 추가

○ 변경사유 : 소방재난본부의 요구로 주차장 출입문 운영방법이 변경되어 주차            차단기 설치 수량 변경

□ 후문 출입문은 관리차량용으로 사용할 예정임

○ 변경도면

당초(차단기 1개+자바라 출입문)	변경(차단기 2개)

□  주요 변경 내역

공종		변경내용	변경금액(천원)
옥외가로등 공사		·메탈등기구 설치 감)13개 ·가로등주 철거·신설 감)9본 ·LED등기구 2등용 증)4개	감)4,350
직접비 계			감)4,350
제경비			감)2,245
도급비			감)6,595
관급자재	가로등	·가로등주 감)9본 ·LED가로등기구 증)4개 ·가로등 암(2등용) 증)4개	감)3,827
	주차관제	·주차차단기 구매·설치 증)1개	증)2,530
합계(도급+관급)			감)7,892

□  건설사업관리단 의견

○ 지하차도 가로등 교체공사는 서부도로사업소에서 LED타입로 기 교체하여 본공사         에서는 불필요하고,

○ 소방재난본부 리모델링에 따른 후문 주차차단기는 차량 출입을 원활히 하기         위해 자바라 출입문을 주차차단기로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

4		보고자 의견

□ 건설사업관리 기술자의 실정보고 내용이 타당하므로 실정보고 승인하고,        증감되는 관급자재 물량은 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)소방재난본부 관련공문 1부. 끝.