문서번호	기반시설과-136
결재일자	2019.1.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
박지수	라철흠	전영주		01/16 정수용
협 조

한강교량 연결 승강기 설치 사업계획 변경

2019. 1.

한강사업본부

(시 설 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

한강교량 연결 승강기 설치 사업계획 변경

한강공원 접근성 향상을 위해 추진중인 “승강기 설치사업”이 관계기관 사업과의 저촉으로 사업대상지를 일부 조정하기 위한 검토 보고임.

Ⅰ		추진경위

○ ’15.11.20. : 한강 자전거 이동 불편에 따른 리프트 설치 검토지시(시장)

○ ’16.07.13. : 한강교량 남.북단 E/V 설치계획 보고(행정2부시장)

○ ’16.07.20. : 한강교량 접근시설(E/V) 개선계획 방침(본부장)

○ ’17.11.30. : 타당성조사 용역완료(연차별 사업계획 수립)

Ⅱ		사업계획

○  사업대상 : 가양대교 남단 서측 외 13개소

○  규    모 : 승강기 설치 13개소 및 계단설치 1개소

○  사업기간 : 2018.02. ~ 2021.12

○  총사업비 : 12,013백만원

○  연차별 투자계획                                     (단위:백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년
소요예산	12,013	1,800	2,700	3,287	4,226
사업위치	14 개소	· 가양대교 남단 · 천호대교 북단 · 성수대교 남단(민원) (성수남단:계단 설치)	· 성수대교 북단 · 성산대교 남단 · 올림픽대교 남단 (‘18. 11 설계 착수)	· 서강대교 북단 · 동호대교 남단 · 동작대교 북단 (동작북단-성능개선)	· 양화대교 북단 · 성산대교 북단 · 천호대교 남단 · 올림픽대교 북단 · 영동대교 북단
사업내용	-승강기+계단 -성능개선	· 승강기 및 비상계단 설치 : 7개소 · 성능개선(계단 → 승강기) : 1개소 · 비상계단 설치(민원) : 1개소			성능개선 5개소 (계단→승강기)

Ⅲ		문 제 점

□ 관계기관 사업과 저촉

○ 2018년 공사 대상인 천호대교 북단 승강기와의 저촉사업

- 관계기관 : 안전총괄실 도로계획과

- 사 업 명 : 천호대교 확장 타당성조사 용역(2019년 시행예정)

- 사업내용 : 천호대로 BRT사업에 따른 교통정체로 천호대교 확장 필요성 검토

○ 2019년 설계 대상인 성산대교 남단 승강기와의 저촉사업

- 관계기관 : 도시기반시설본부 터널건설과

- 사 업 명 : 성산대교 성능개선공사(2020년 완료 예정)

- 사업내용 : 승강기 설치 지점에 성산대교의 개선공사중

□ 당해년도 설계로 공사발주 지연

○ 연차별로 계획된 사업대상에 대하여 당해년도에 설계를 실시함에 따라 공사발주가 연말로 지연되어 예산 사고이월 및 계획년도에 공사 미완료

Ⅳ		조치의견

□ 연차별 사업계획 변경(안)

○ 2018년 발주한 공사 대상인 천호대교 북단은 올림픽대교 남단(당초 2019년 대상)으로 변경

- 2019년 사업대상 중 올림픽대교 남단은 별도의 교량 진·출입시설이 없음

○ 2018년 발주한 설계 대상인 성산대교 남단은 동작대교 북단(당초 2020년 대상)으로 변경

- 타당성조사 결과 동작대교 북단의 비용편익비(B/C)가 가장 높음

○ 연차별 사업계획 변경(안)

연도별 구 분	2018년	2019년	2020년	2021년
당 초	· 가양대교 남단 · 천호대교 북단 · 성수대교 남단(계단) (2019로 공사이월)	· 성수대교 북단 · 성산대교 남단 · 올림픽대교 남단	· 서강대교 북단 · 동호대교 남단 · 동작대교 북단	· 양화대교 북단 · 성산대교 북단 · 천호대교 남단 · 올림픽대교 북단 · 영동대교 북단
변 경	· 가양대교 남단 · 성수대교 남단(계단) · 올림픽대교 남단	· 성수대교 북단 · 동작대교 북단	· 서강대교 북단 · 동호대교 남단 · 양화대교 북단	· 올림픽대교 북단 · 영동대교 북단 · 성산대교 남.북단 · 천호대교 남.북단

- 타당성 조사 결과 비용편익비가 높은 순으로 계획시기 조정

- 관계기관 저촉 구간인 천호대교 및 성산대교는 2021년에 시행

□ 설계시기 조정

○ 당해년도의 공사 대상에 대해서는 전년도에 실시설계를 시행하여 연초에 공사를 발주함으로써 계획 기간 내 공사 완료

- 2020년 공사 대상은 금년 예산(150백만원)을 활용하여 2019년 초기에 설계용역 발주

Ⅴ		행정사항

□ 2018년 발주 공사

○ 계약상대자에게 사업계획 변경 내용을 통보

- 올림픽대교 남단의 실시설계 완료 시점(2019년 2/4분기 예정)에 공사대상 변경에 따른 설계변경 시행

□ 2018년 발주 설계용역

○ 계약상대자에게 과업대상 변경 사항을 통보하고 용역 변경계약 시행

붙임 : 경제적 수익성 분석결과 1부.  끝.