투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『기번아일랜드 설명판 제작 및 아프리카관 현판 보수용역 』준공기한 연기 의뢰

1. 동물기획과-229호(2019. 1. 16.)와 관련입니다.

2.『기번아일랜드 설명판 제작 및 아프리카관 현판 보수용역』의 준공기한을 아래와

같이 연기하고자 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 기번아일랜드 설명판 제작 및 아프리카관 현판 보수용역

나. 계 약 자: ************

다. 계약금액: ************

라. 준공기한: 2018. 12. 19. ~ 2019. 1. 17.

마. 사 유: **************************

바. 귀책소재: 서울대공원

사. 지체상금 부과여부: 미부과

3. 준공기한 연기 내용

구 분	당 초	변 경 후	비 고
설명판 제작 및 현판 보수 용역	2018. 12. 19. ~ 2019. 1. 17.	2018. 12. 19. ~ 2019. 2. 28.	42일간

붙임: 1. 용역 준공기한 연장 검토 보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	동물기획과장
주무관	최진		주무관	김지은		동물기획과장	01/16 김보숙
협조자
시행	동물기획과-231	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화	500-7722	/전송	500-7995	/	zoocurator@seoul.go.kr	/	대시민공개