문서번호	급수운영과-1440
결재일자	2019.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		01/17 이구석
협 조
	시설관리팀장		박종일
	주무관		노운학

2019년 노후 배급수관 정비사업 추진계획

2019. 1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 노후 배급수관 정비사업 추진계획

연차별 노후 배급수관 정비계획에 따라 누수․녹물이 예상되는 상수도관을 정비하여 깨끗한 수질유지 및 누수방지를 통한 안정적인 급수체계 구축하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 2019년 배급수관 정비사업 대상 선정 및 심사계획(2018. 11. 16.)

○ 2019년 배급수관정비 사업계획심사 결과보고(2018. 12. 26.)

□ 추진방향

○ 녹물 및 누수발생이 많은 취약지역, 소출수 지역 블록단위 집중 정비

○ 비내식성 배급수관은 내식성관으로 교체(분기점 원천철거･폐쇄)

< 배급수관 >				< 급수관 >
	⇨				⇨
無라이닝 주철관		에폭시 라이닝 주철관		아연도강관		스테인리스강관

□ 현 황

○ 정비목표: 350㎜이하 아연도강관 및 회주철관 교체

○ 노후 송배수관 정비사업 현황(최근 3년간)

구 분	총 계	2016년	2017년	2018년	2019년	비고
연장(km)	41.6	10.1	11.5	9.7	10.3
사업비(억원)	343	81	90	76	96

Ⅱ		2019년 정비계획

□ 2019년 사업대상 선정(우선순위)

○ 민원발생(녹물출수 등) 및 누수발생 노후관

○ CIP관(’93년이전 세척갱생관 포함)경과년도가 오래된 노후관

○ 서울형 도시재생사업 선정지역내 노후관

□ 정비목표: 10.3km (사업비 9,600백만원)

□ 배급수관 정비계획(총괄)

(단위:m, 백만원)

구분 구별	계		단위사업(80%이상)			연간단가(20%이내)
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	10,300	9,600	6	7,847	7,745	2,453	1,855
광진구	1,030	940	1	800	760	230	180
성동구	2,000	1,882	1	1,860	1,750	140	132
동대문구	6,480	6,078	4	5,187	5,235	1,293	843
중랑구	790	700	-	-	-	790	700

□ 단위사업 발주계획

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계: 6건		100～300	8,698	7,000
1	중곡동 104-5~구의동 556-6 외 9개소 배급수관 정비공사	150~200	1,300	1,230	급수운영과 (광진구 800m)
2	옥수동 100~204-1 외 8개소 배급수관 정비공사	100~300	1,360	1,280	급수운영과
3	제기동 519번지 일대 외 5개소 배급수관 정비공사	150~200	1,200	1,328	시설관리과
4	장안동 95번지 일대 외 8개소 배급수관 정비공사	150~200	1,307	1,177	시설관리과
5	회기동 66-1~80-1번지 외 2개소 배급수관 정비공사	150~300	1,380	1,519	시설관리과
6	전농동 295-5~답십리동257-7 외 1개소 배급수관 정비공사	300	1,300	1,211	시설관리과

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
2019. 1.		2019. 2.		2019. 2.		2019. 3.		2019. 3~4.		2019. 11.

○ 1. 3.~1. 11. ----- 공사 감독자 지정의뢰 및 합동 현장조사

서울시설공단(공사감독2처) 설계 참여

○ 1. 16.(수) -------- 배급수관 정비사업 설계도면 심사(본부 누수방지과)

심사결과에 따라 설계서 작성 후 계약심사 의뢰

○ 2. 6.~2. 9. ------ 상수도공사 공통 일위대가 작성(품 산정, 운반거리 산출)

본부 기본 일위대가 통보 ⇒ 사업소 공통 대가 수정

○ 2. 18.~2. 28.---- 계약심사 의뢰(토목공사 5억원 이상 본청 계약심사과)

공사 5억원 미만은 본부 재무회계과 의뢰

○ 3월~4월 ---------- 공사 발주 및 착공

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술검토 실시

- 횡단굴착 등을 통해 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계 부터 공법변경 등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토  실시(필요시 본청 및 본부 기술검토 협의)

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사   지연 방지

- 도로굴착 승인, 교통소통대책 용역 발주 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 녹물출수, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계 부터 안내문 부착,   홈페이지 공지 등을 통한 충분한 홍보 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고: 매월 5일 이내, 본부 누수방지과

○ 사전 도로굴착사업계획조정 신청: 2019년 1월

- 도로법 시행령 제56조에 따라 해당 도로관리청(특별시도: 도로사업소, 구도: 해당구청)에 신청기간 내 도로굴착사업계획서 등 관련자료 제출

○ 교통소통 대책수립 용역발주: 2019년 2월

- 도로 1개 차로이상 점용, 점용기간 20일 초과(서울특별시 도로점용  공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조)

붙임  1. 2019년도 노후 배급수관 정비사업 추진계획서 1부.

2. 노후 배급수관 현황 및 연차별 정비계획 1부.

3. 배급수관 정비공사 단위사업 카드 각 1부.

4. 2019년 배급수관 정비사업 현황(위치도 포함) 각 1부.  끝.