문서번호	급수운영과-1442
결재일자	2019.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		01/17 이구석
협 조
	시설관리팀장		박종일
	주무관		노운학

2019년 노후 송배수관 정비사업 추진 계획

2019. 1.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2019년 노후 송배수관 정비사업 추진계획

빈번하게 누수가 발생하고 있는 400mm 이상 노후 회주철관과 강관을 정비하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거

○ 2030 수도정비기본계획

○ 2019년 노후 송배수관 정비계획(배수과-10244호, 2018. 12. 31.)

□ 현 황

○ 정비목표: 400㎜이상 회주철관 및 노후 강관 교체

○ 노후 송배수관 정비사업 현황(최근 3년간)

구 분	총 계	2016년	2017년	2018년	2019년	비고
연장(km)	11.9	2.8	3.0	4.1	2.0
사업비(억원)	278	81	82	75	40

※ 2019년 정비대상 2,010m 중 회주철관 960m, 노후 강관 1,050m

○ 노후 송배수관 정비사업 대상

- 내부라이닝이 되어있지 않아 녹발생이 많은 회주철관

- 누수 다발 등 노후 강관 우선 정비

○ 추진방법

- 송배수관 정비사업 정비물량 선정

- 정비대상의 적정성, 사업의 연계성 등 본부 심사

- 설계, 발주, 공사 시행(서울시설공단 감독)

- 본부에서 예산, 공정관리, 교육 등 사업관리 시행

Ⅱ		2019년 정비계획

□ 2019년 사업대상 선정

○ 사업 우선순위

- 400mm이상 내부라이닝이 되지 않은 회주철관으로 도로굴착 승인이 가능한 구간

- 누수 발생이 빈번한 노후 강관

- 기타 이물질 및 적수발생으로 민원이 발생하여 정비가 필요한 노후된 관

□ 정비목표: 2.0km (사업비 4,000백만원)

□ 송배수관 정비계획

○ 정비공사: 2건 발주

○ 단가계약공사: 1건(소규모, 건별 추진)

(단위: m, 백만원)

공 사 명		기존관현황				공사개요		사업비 (백만원)	사업 구분	시행 부서
		구경	연장	관종	부설 년도	구경 (㎜)	연장 (m)
소계 : 3건		400~ 1,000	2,010	CIP, SP		150~ 800	2,040	4,000
응봉사거리주변 외 1개소 송배수관 정비공사		600~ 1,000	1,470	CIP, SP		400~ 800	1,470	3,250	정비 공사	급수 운영과
	도선사거리~왕십리역주변	700	550	CIP	1979	400	550	900
	응봉사거리	600	290	CIP	1955	300	290	350
	응봉사거리	800	400	SP	1976	800	630	2,000
	응봉사거리	1000	230	SP	1976
답십리동 488~12-266호간 송배수관 정비공사		400	420	SP		150~ 500	450	600	정비 공사	시설 관리과
	답십리 현대시장 내부	400	420	SP	1980	150	250	200
	답십리동 276~488간					500	200	400
광나루로 614앞 외 3개소 송배수관 정비공사		400~ 500	120	CIP		300~ 500	120	150	단가 계약	급수 운영과
	광진구 광나루로 614	400	20	CIP	1982	400	20	30	건별
	광진구 자양로15길6	400	40	CIP	1981	400	40	40	건별
	광진구 능동로 216	500	30	CIP	1980	500	30	50	건별
	광진구 아차산로 221	600	30	CIP	1979	300	30	30	건별

□ 추진일정

도면심사	⇒	일위대가	⇒	계약심사	⇒	공사발주	⇒	계약및착공	⇒	준 공
2019. 1.		2019. 2.		2019. 2.		2019. 3.		2019. 3~4.		2019. 11.

○ 1. 3.~1. 11. ------ 공사 감독자 지정의뢰 및 합동 현장조사

서울시설공단(공사감독2처) 설계 참여

○ 1. 17.(목) --------- 송배수관 정비사업 설계도면 심사(본부 배수과)

심사결과에 따라 설계서 작성 후 계약심사 의뢰

○ 2. 6.~2. 9. ------- 상수도공사 공통 일위대가 작성(품 산정, 운반거리 산출)

본부 기본 일위대가 통보 ⇒ 사업소 공통 대가 수정

○ 2. 18.~2. 28. ---- 계약심사 의뢰(토목공사 5억원 이상 본청 계약심사과)

공사 5억원 미만은 본부 재무회계과 의뢰

○ 3월~4월 ----------- 공사 발주 및 착공

□ 중점 추진사항

○ 철저한 현장조사 및 선제적 기술검토 실시

- 횡단굴착 등을 통해 지하매설물에 대해 세밀한 현장조사 실시

- 설계단계 부터 공법변경 등 예측 불가능한 상황에 대비한 기술검토  실시(필요시 본청 및 본부 기술검토 협의)

○ 공사시행 전후 필요한 선행절차 이행 철저

- 현장여건에 부합된 설계내역 작성으로 계약심사 보완 최소화 및 심사   지연 방지

- 도로굴착 승인, 교통소통대책 용역 발주 및 유기관기관 협의 등 병행 추진

○ 공사 예정지역의 잠재적 민원 사전 예측 및 해결방안 마련

- 녹물출수, 야간공사 예정지역에 대해 공사 초기단계 부터 안내문 부착,   홈페이지 공지 등을 통한 충분한 홍보 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 추진실적 보고: 매월 7일 이내, 본부 배수과

○ 사전 도로굴착사업계획조정 신청: 2019년 1월

- 도로법 시행령 제56조에 따라 해당 도로관리청(특별시도: 도로사업소, 구도: 해당구청)에 신청기간 내 도로굴착사업계획서 등 관련자료 제출

○ 교통소통 대책수립 용역발주: 2019년 2월

- 도로 1개 차로이상 점용, 점용기간 20일 초과(서울특별시 도로점용  공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조)

붙임  1. 2019년 노후 송배수관 정비 추진계획(본부) 1부.

2. 노후 송배수관 정비사업 세부 내역 1부.

3. 2019년 송배수관 정비사업 현황(위치도 포함) 각 1부.  끝.