＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약체결 보고-서울물연구원 연구실 증축 정보통신공사(장기계속)

『서울물연구원 연구실 증축 정보통신공사(장기계속)』건에 대하여 변경계약체결

하고 결과를 보고합니다.

1. 변경계약내역

업체명	대표자	주소	금차계약금액
㈜일동전력	오정미	서울특별시 마포구 월드컵로190, 305호(성산동, 이안상암2차)	15,000,000원

가. 변경계약일자 : 2019. 1. 17.

나. 변경전 금차준공일자 : 2018. 12. 14.

다. 변경후 금차준공일자 : 2019. 3. 28.

라. 준공기한변경사유 : 건축,토목분야 공정과 상이하여 절대 공기 부족

붙임  1. 공사변경계약서 1부

2. 합의각서 1부

3. 산출내역서(1차) 1부

4. 산출내역서(총차) 1부.  끝.

주무관	이준영		총무과장	이미영		서울물연구원장	01/17 주윤중
협조자
시행	총무과-703	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)