투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	원무과장
(경유)
제목	24시간진료실 의료용 가스(콘솔)설치 공사 계약기간 변경 의뢰

1. 은평병원 현대화사업 추진계획(원무과-13356호, 2018.10.17.) 및 의료용가스(콘솔)

설치 공사 발주의뢰(2018.12.6.)와 관련입니다.

2. 24시간진료실 현대화공사 의료용 가스 설치 공사를 발주의뢰하였으나 공사기간이 변경되어 계약기간을 변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 은평병원 24시간진료실 의료용 가스 설치 공사

나. 공사내용: 의료용 가스(oxygen, vaccum) 배관 및 콘솔 설치

- AREA ALARM SYSTEM(OXYGEN, VACCUM)

- BED HEAD UNIT(콘솔)

다. 계약업체: 한국메디플랜(주)

라. 기존 공사기간: 계약일로부터 30일 이내(건축공사기간에 연동되어 연장될 수 있음)

마. 변경 공사기간: 2019.02.28.(목)

사. 변경사유: 가스배관착공과 헤드유닛(콘솔)설치가 별도로 이루어져 가스배관은 벽체조적

공사와 함께 착공되나 콘솔 및 알람시스템은 미장 및 도장공사가 된 이후에

설치하므로 공사완료시점(예상: 2월말)까지 연장하고자 함.

붙임  (별도)계약업체 계약변경각서 1부.  끝.

	간호부장
주무관	정경미		간호과장	유정자		★간호부장	01/17 박영숙
협조자	주무관	변정순
시행	간호과-275	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원 (응암동)	/
전화	02-300-8117	/전송	02-300-8189	/		/	대시민공개