문서번호	물재생시설과-857
결재일자	2019.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
김병오	송동욱	임춘근		01/18 이정화
협 조

2019년 차집시설 정비방안 추진계획 보고

2019. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 차집시설 정비방안 추진계획 보고

2019년 차집시설 개선을 위해 확보 된 시설비(시비, 각 센터) 사업에 대한 정비방안 추진계획을 보고드림

Ⅰ		차집관로 대상사업

【차집관로 성능개선】

□ 위    치 : 개봉유수지, 중랑천

□ 규    모

○ 개봉유수지 횡단 차집관로 신설 : D300~1,100㎜(L=322m)

※ 차집관로 성능개선 시행 실적(‘14~’18) : 12.274㎞(붙임 다)

○ 우수토실 정비, 내부조사 등

□ 사업내용 : 개봉유수지 악취 저감, 차집관로 시설물 정비 등

□ 사 업 비 : 7,105백만 원(개봉유수지 3,105백만 원)

□ 사업기간 : ‘19. 1 ~ 12

【차집관로 내부 점검 및 정비】

□ 사업내용 : 노후 차집관로 점검 및 보수 등

□ 사 업 비 : 14,800백만 원

○ 센터별(백만 원) : 중랑 8,000, 난지 4,500, 탄천 500, 서남 1,800

□ 사업기간 : ‘19. 2 ~ 12

□ 사업방안

○ 정비대상 : 42.85㎞

- 센터별(㎞) : 중랑 38.2, 난지 3.22, 탄천 0.5, 서남 0.93

○ 관로조사 : 대상 117㎞

- 조사용역비 및 차집관로 시설물 유지보수비 등을 활용하여 전수조사 실시

Ⅱ		추진경위

□  ‘10.5 ~ ’13.8(2회) : 차집시설 현황 및 성능조사 용역 시행

○ 통수능 부족 : 70.2Km(총 468Km의 15%)

- 1.5Q 미만 23.3Km(5%), 1.5~3.0Q 46.9Km(10%)

□  ‘14 ~ ’18 : 차집관로 성능개선 사업 시행

○ 차집관로 통수능 부족 1.5Q 미만 및 연접관로 12.3Km 시행

□  ‘16.4~’18.6 : 차집관로 성능개선 용역 시행(2차)

○ 실시설계 : 11.2Km(1.5Q 미만 통수능 부족구간)

Ⅲ		추진방향

【차집관로 신설 및 통수능 확보】

□ 시설물 유지관리 등 업무 효율성 고려 점검 및 공사시행

○ 구로구(치수과) 시행 : 개봉유수지 횡단 차집관로 설치공사(신설)

○ 물재생시설과 시행 : 차집관로 성능개선 공사(연차 사업)

	< 차집관로 성능개선 예산 배정계획 >
□ 예 산 액 : 7,105백만 원(시비) □ 예산과목 : 시설비(차집관로 성능개선), 감리비(차집관로 성능개선) □ 집행계획 ************************************* ********************************* *********************************** ********************************************* ********************************************* ○ 중랑천 차집관로 성능개선 공사【 중랑물재생센터 】 ************************************* ****************************************************************************************************************************************************************************** ********************************************************

【노후 차집관로 내부 점검 및 정비】

□ 추진방안

○ 관로 내부 사전 철저 조사 후 필요성 여부 검토 시행

□ 정비대상 : 내부조사 후 구조물 안전 및 연결부 누수 등 필요구간

○ 차집관로 총연장 468Km(원형관 201, 박스관 194, U형관 73)

‣ 차집관로 내부조사 실적                      (2018.12.31. 기준)

계(Km)				원형관(Km)				박스관(Km)				U형관
총 연장	조사 완료	제외 구간	조사 대상	총 연장	조사 완료	제외 구간	조사 대상	총 연장	조사 완료	제외 구간	조사 대상	상시 점검 및 보수 (73)
395	200	78	117	201	83	56	62	194	117	22	55

※ 제외구간(151㎞) : 공사예정 및 정비완료 구간, 압송관로 등(78㎞),  U-TYPE 차집관로(73㎞)

□ 조사방법

○ 센터별 박스관 등 내부 전수조사 후 센터별 연차별 정비계획 수립

- 조사 시 육안 및 CCTV, 물돌리기 후 내부 점검 및 보수

- 유량 과다구간 점검 가능한 장비(SONER 초음파 장비 등) 적극 도입

※ 하수암거의 경우 조사결과 구조적 상태진단이 필요하다고 판단되는 경우 정밀진단 추가시행

□ 정비방법

○ 관로 내부조사 잔여구간(117km) 조사 후 연차별 정비 : ‘19년

Ⅳ		향후계획

□ ‘19. 1 : 방침 통보(서울시)

□ ‘19. 2 : 차집관로 내부조사 및 정비계획 수립(각 센터)

□ ‘19. 2 : 업무 협의, 설계도서 심사, 예산 재배정 및 사업 발주

□ ‘19. 3 ~ 12 : 사업 시행

□ ‘19. 12 : 사업 완료

붙임 : 가. 차집시설 시설비 현황 1부.

나. 차집관로 내부조사 현황 1부.

다. 차집관로 성능개선사업 추진실적(‘14~’18년) 1부. 끝.