문서번호	물재생시설과-931
결재일자	2019.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	물재생시설팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	이웅희	임춘근		01/18 이정화
협 조

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립 용역

준공기한 연기 보고

2019. 1.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립 용역

준공기한 연기 보고

『중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립』용역의 내실 있는 과업수행을 위한 용역 준공기한 연기 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(장기-2차)    ○ 계 약 자 : ㈜이산 외 2(㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜ 동해종합기술공사)

○ 계약금액 : 금 416,820,000원(일금사억일천육백팔십이만원정)

○ 용역기간 : 2018. 1.15 ~ 2019. 1.21

○ 주요 과업내용

- 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립

․ 기존 시설 운영현황 분석 및 시설 계획의 기본방향

․ 추정공사비 산정 및 재정계획 수립/ 운영 관리 계획 및 통합 관리 시스템 구축

- 서남물재생센터 계획기준 및 시설계획 수립

․ 기존 시설 운영현황 분석 및 시설 계획의 기본방향

․ 추정공사비 산정 및 재정계획 수립

□ 용역 추진사항

○ ’17.  8.25 ~ ’17.12.21 : 1차 용역 시행

○ ’18. 1.15 : 2차 용역 계약 · 착수

○ ’18. 2.13/ 4.17 : 1, 2차 자문회의

○ ’18. 2.28/ 5. 9/ 9.19 : 행정2부시장 보고(3회)

○ ’18. 12.10 : 3차 자문회의

○ ’18. 12.18 : 행정2부시장 보고

※ 도시재생본부(공공개발센터)와 협업체계 구축 TF 회의 16회 개최

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경
기 간	’18. 1.15 ~ ’19. 1.21	’18. 1.15. ~ ’19. 3.29

○ 계약금액 : 변동없음(지체상금 미부과)

○ 연기사유

- 협업체계 구축중인 공공개발기획단의 부지활용 기본계획 수립 용역과 연계 추진을  위해 준공기한 연기 필요

(※ 중랑, 서남물재생센터 부지활용 기본계획 수립 용역 준공기한 : 2019. 3. 29.)

□ 향후 일정

○ 용역 준공 : ’19. 3

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.