문서번호	행정지원과-1514
결재일자	2019.1.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	엄태현	한병주	01/21 박영헌

2019년

청사 내진성능 보강공사 실시계획

2019. 1. 21.

서부수도사업소

【행정지원과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2019년

청사 내진성능 보강공사 실시계획

2016년 청사 내진성능평가 결과 내진2등급(붕괴방지)으로 평가됨에 따라 청사 내진성능 보강공사를 추진하여 불특정 다수의 시민들이 출입하는 공공청사에 대한 안전성을 확보하고자 함.

□ 관련근거

❍ 지진·화산재해대책법 제16조(기존시설물의 내진보강 추진 등)

❍ 서울시 지진방재종합계획(서울시장방침, 상황대응과-7575, 2016.6.15.)

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 서부수도사업소 청사 내진성능 보강공사

❍ 위    치: 서울시 서대문구 통일로26길 41, 청사 본관

❍ 공사규모: ********************************

❍ 공    법: **********

❍ 공사기간: 2019. 05. ~ 08.(약4개월)

❍ 공 사 비: ********************

□ 지금까지 추진사항

❍ 청사 내진성능평가 추진계획 수립: 2016.10.26.

❍ 청사 내진성능평가 실시 및 결과보고: 2016.12.28.

[계약업체: ㈜시엘에스이엔지]

********************* 별관-거주가능, 팔각정-인명안전)

· 내진성능목표: 내진특등급(거주가능)→건축구조기준(국토교통부고시)

❍ 청사 내진성능보강공사 계획 수립 및 예산 재배정(본부→사업소): 2017.1.13.

❍ 청사 내진성능보강공사 실시설계 결과 보고: 2017.7.27.

[계약업체: ㈜씨에이엘건축사 사무소]

❍ 청사 내진성능보강공사 실시설계 결과 제출(사업소→본부): 2017.8.22.

❍ 청사 내진성능보강공사 2019년 예산편성: 2019.1.

□ 추진사항에 대한 검토결과

❍ 토목,건축 공사의 경우 특정제품(공법)당 5천만원을 초과하는 경우 특정제품 선정심사 대상임(규칙 제5조의2 제③항)

❍ 내진성능평가 용역(2016.12.28.) 및 내진성능 보강공사 실시설계 용역(2017.7.27.) 에서 내진성능 보강공사 공법으로 선정된 부분에 대한 “특정제품 선정심사” 미실시

- 공법 적용 사유: 시공성 용이, 성능 향상효과 우수 등

□ 추진계획

❍ 내진성능평가 용역에서 선정된 공법 심사 실시: 공법선정 위원회

- *****************

※ ************************

- ******************

보강공법 검토서 작성 (내진평가 및 실시설계 계약업체)	⇒	보강공법 선정 위원회 회의	⇒	공법 선정 결과 보고

※ 특정제품 선정심사위원회 대체(서울시 계약심사 업무처리 규칙 제5조의 2

(특정제품 선정심사)

❍ 신기술, 특허 사용협약 체결: 2019. 2월

❍ 계약업체 선정

- 입찰방법: 공개경쟁입찰

- 입찰참가자격법: 건설산업기본법 제9조 시설물관리유지업을 등록한 업체

- 소요예산 : 570백만원(공사 550, 감리 20)

- 예산과목

․ 공사: 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비및부대비, 시설비

․ 감리: 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비및부대비, 감리비

□ 향후계획

❍ 2019. 3.: 본청(안전감사담당관, 계약심사과) 일상감사 의뢰 및 결과 통보

❍ 2019. 4.: 발주 및 업체 선정

❍ 2019. 5.~8: 공사착공 및 준공.

붙임  추진사항 자료 5부.  끝.