문서번호	물재생계획과-960
결재일자	2019.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈		김준형	01/21 하상문
협 조
	주무관			이승주

「2019년도」

강남역 일대 침수해소사업 예산배정 계획

2019. 1

물재생계획과

강남역 일대 침수해소사업 예산배정 계획

강남역 일대 침수해소사업을 위하여 편성된 2019년도 예산에 대하여, 사업별 적정한 예산을 신속 배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

☐ 사업개요

❍ 사업명 : 강남역일대 침수해소사업(유역경계조정)

❍ 사업규모 : 87.1 ha

❍ 사업예산 : ‘19년 9,400백만원

- 유역경계조정(3,400백만원), 서운로 저지간선관로확장공사(6,000백만원)

☐ 추진현황

❍ 유역경계조정 공사

(단위 : 백만원)

연도별	사업개요(a)	사업비	집행액	비고
합계	87.1ha	34,000	10,583
2016년	21.8ha	4,000	3,451	1,2,3차분
2017년	37.8ha (22.9완료 14.9예정)	8,000	896	4차분 장기계속공사 (서초구 잔여분)
2018년		7,200	6,236
2019년		3,400	-
향후	27.5ha	11,400	-	2021년완료

❍ 서운로 저지간선관로확장공사

- 용역추진중 :  2017.12.15. ~ 2019.3.30

- 개략공사비 : 약 158억원

- 2019년 편성예산 : 60억원(공사비)

☐ 2019년 예산배정 검토

❍ 예산배정 방향

- 유역경계조정공사(4차분) : 잔여분 완료를 위한 신속한 사업비 배정

- 서운로 저지간선관로확장공사 : 조속한 공사착공을 위하여 설계도서가 완료되면 예산배정 방침 후 배정(장기계속공사)

❍ 예산 배정(안)

- 예산 총액 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

사업부서	합 계	유역경계조정	서운로저지간선관로확장공사	비고
합 계	9,400	3,400	6,000
서초구	3,600	3,400	-
미확정	6,000		6,000

※ 서운로 저지간선관로 확장공사비용은 용역 준공시 별도 방침으로 결정

- 배정시기

· 유역경계조정공사비 : 1월

· 서운로저지간선관로 확장공사 : 3~4월

☐ 조치계획

❍ 상기 배정안에 따라 조기 예산을 재배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함