“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(중랑 시설현대화(2단계) 기본계획 수립 용역)

1. 물재생시설과-931(2019.1.18.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립 용역」에 대하여 아래와 같이 준공        기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 시설현대화(2단계) 기본계획 수립(장기-2차)

나. 계약번호(계약상대자) : 20180*******02((주)이산)

다. 준공기한 연기 : ‘19. 3.29.(당초 ‘19. 1.21.)

라. 용 역 비 : 변경없음

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서(변경계약) 1부. 끝.

							물재생시설과장
전문관							양해선			물재생시설팀장					이웅희					물재생시설과장					01/21 임춘근
협조자				계약1팀장						조현
시행			물재생시설과-936									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		02)2133-3826						/전송			02)2133-1043					/													/	대시민공개