문서번호	자원관리과-956
결재일자	2019.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비관리팀장	자원관리과장		서울종합방재센터소장
장순성	배미순	조규관		01/22 김학준
협 조
	119구급상황관리센터장		이희순
	상황총괄팀장		손문범
	전산통신과장		윤기응
	행정팀장		조문현

업무 효율화를 위한
사무공간 재배치 계획

서울종합방재센터

[자원관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

업무효율화를 위한 사무공간 재배치 계획

사무공간 및 대기공간의 재배치 및 보수·보강을 통해 편리하고 실용적인 사무공간과 쾌적하고 편안한 대기공간을 조성하여 청사관리와 업무의 효율성을 증대코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

자원관리과-648(2019.01.15.)호 『2019년  서울종합방재센터

청사 관리계획

소장 지시사항(2019.1.9.)“행정팀 및 상황총괄팀 업무 효율성 증대를 위한 사무공간 재배치 검토”

Ⅱ		추 진 방 향

업무의 신속성 및 효율성 극대화를 위한 주요부서(행정팀,  상황총괄팀)의  사무공간 재배치

구급상황관리사 대기실 및 당직실을 지상으로 이전, 환경개선을 통해 쾌적한 대기공간 조성

재배치후 남은공간(구.행정팀)은 물품 등의 보관창고로 활용

Ⅲ		세부추진계획

1		이 전 현 황

구분	現 사무실		이전 사무실
행정팀	서울소방재난본부 (2층 자원관리과) 46㎡ 사용		센터 지하1층 41㎡사용
상황총괄팀	센터 지하1층 41㎡사용		센터 지하1층 총 40㎡사용
대기실 및 당직실	지하1층 40㎡사용		센터지상 컨테이너 1동 18㎡사용
물품 창고	창고 미확보		서울소방재난본부 2층 자원관리과 사무실 분할하여 물품창고 확보

2		사업개요

사무공간 재배치 및 이전

□ 공사기간 : 2019. 1. 28.  ~ 2. 8.(예정)

□ 규    모 : 가설공사, 철거 및 기타공사, 목공사, 전기공사

도배공사(컨테이너),바닥공사,SGP공사(벽설치)

기타공사(포장이사,통신시설 설치, 파티션 설치)

□ 공사내용

장 소	공사내용	비 고
행정팀	포장이사(책상, 캐비넷, PC, 냉장고등 주요물품 등)
상황 총괄팀	바닥공사(데코타일 교체) 칸막이벽 제거 공사 등기구(LED) 교체 통신설비 공사 블록파티션 설치 포장이사(책상, 캐비넷 등 주요물품 등)
당직실 및 구상관리사 대기실	컨테이너 바닥공사(장판시공) 컨테이너 벽 공사(도배) 페브릭파티션 설치 등기구(LED) 보강 및 환풍기 교체 PC통신 및 랜선 포장이사(캐비넷, 침대 등 주요물품)
물품창고	장비관리팀 위치 이동(장비관티팀→행정팀) SGP칸막이 공사(물품등 보관창고 칸막이 설치)

□ 공사 및 이전 진행순서

1		2		3		3		4
컨테이너 대기실 공간조성		당직실 및 구급상황 관리사 대기실 이전		상황총괄팀 바닥등 공사 및 이 전		행정팀 이 전		장비관리팀 위치이동 및 물품창고 조성

3		재배치(안)

행정팀

상황총괄팀

당직실 및 구상관리사 대기실

Ⅳ		예산조치 계획

1		소요예산

소요예산 : 금16,417,000원(금일천육백사십일만칠천원)

□ 재배치 공사 : 금14,597,000원(금일천사백오십구만칠천원)

□ 사무실 이전 : 금1,820,000원(금일백팔십이만원)

2		예산내역

구분			소요 예상액	비고
세부사업	통계목	사업명	16,417,000
서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리	공공운영비	재배치 공사	14,597,000
기본경비	사무관리비	사무실 이전	1,820,000

Ⅴ		계약추진

1		계약방법

계약방법 : 나라장터를 통한 전자수의시담(G2B)

□ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

시행령 제25조 제1항 제5호 나목

2		추진일정

사업발주 : 2019. 1. 22. ~ 1. 23.

공고 및 계약 : 2019. 1. 24. ~ 1. 28.

착수 및 완공 : 2019. 1. 28. ~ 2. 8.

Ⅵ		행정사항

상황총괄팀장, 구급상황관리센터장, 행정팀장은 사무실 이전에  따른 제반사항(물품 재배치 등)에 대해 관리감독에 철저를   기하여 주시고,

전산통신과장은 통신시설(행정망 및 지령망, 전화 등)이 적절히 설치되도록 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.