투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	자연석판석 규격변경에 따른 협의요청

1. 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업과 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진하고 있는『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 차도 및 보도 포장재인 자연석판석의 시공관리 및 생산성 향상을 위하여 아래와 같이 규격변경에 대하여 협의하오니 자재수급 및 공사의 시급성을 감안 이른 시일내에 협의결과(1/28일한)를 통보하여 주시기 바랍니다

□협의요청 내용

구 분		협 의 내 용		변경내용	변경사유
		변경 전	변경 후
자 재 명		자연석 판석	자연석 판석	변경없음	-중량 감소에 따른 시공성 향상 -생산성 향상으로 자재수급 원활 -인력으로 운반 및 시공가능
규격	폭	35㎝	30㎝	5㎝축소
	두께	10∼15㎝	10∼15㎝	변경없슴
포장패턴		대청마루	대청마루	변경없슴

따로붙임 : 포장패턴도면1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(역사도심재생과장),종로구청장(도로과)
주무관	김성권		광역도로과장	代이한규		토목부장	01/23 김영수
협조자	주무관	박현희
시행	토목부-1321	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	sssggk@seoul.go.kr	/	대시민공개