문서번호	설비부-1026
결재일자	2019.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	01/23 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 통신공사

공기연장 및 계약금액조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 통신공사

공기연장 및 계약금액조정 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로 부터 제출된 공기연장 및 계약금액 조정 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 통신공사

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.9. ~ `19.5.8.

□ 도 급 비 : 873백만원

□ 계 약 자 : ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ `19.01.15. : 통신공사(총차,3차) 공기연장 및 계약변경 요청에 대한 검토 보고

□ 계약 변경 현황

○ 공사기간 변경

- 변경 사유 : 운영부서 요구사항 반영에 따라 건축공사의 공사기간이
2019. 8.31.로 연기됨에 따라 후속공정인 통신공사 연기 필요.

- 공사기간 변경 현황

구 분	공 사 기 간		비고
	당 초	변경
총 차	`17.11.16. ~ `19.05.08.	‘17.11.16. ~ ’19.08.31

○ 공사금액 변경

- 변경 사유 : 물가변동에 따른 계약금액 조정(ESC 1회)

- 물가변동에 따른 계약금액(1회) 조정

구 분	기 준	1 회	비고
전 체		************
물가변동기준시점	계약일	2017.11.02.
물가변동비교시점		2018.09.01.
기간 경과	계약일로부터 90일 경과	294일
공정률	실공정	9.57%
제외금액		***********
적용금액		************
물가변동조정율	3% 이상	6.56%
ESC 조정금액		***********

※ ‘18.11.30 : 도시기반시설본부-18-13942 물가변동에 따른 계약금액 조정(1회) 승인

- 공사금액 변경 현황

(금액 : 원)

구 분	당초	변경	증감	비 고
총 차	***********	***********	**********	ESC
1 차	**********	**********	*	준공
2 차	***********	***********	*	준공

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 전기공사(총차, 3차) 공기연장 및 계약금액 조정 요청에 대한 검토결과, 위 검토 내용과 같이 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 공기연장, 계약금액 조정 요청사항 검토 결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 총무부에 설계변경 계약의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 1부.  끝.