문서번호	현장민원과-1096
결재일자	2019.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강동수도사업소장
김주경		김인웅	01/24 代박성주
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2019년 노후 옥내급수관 교체 추진계획

2019. 1. 24.

강동수도사업소

고도정수처리시설 구축 완료에 따른 깨끗한 아리수를 시민들이 체감할 수 있도록 노후 옥내급수관 교체를 적극 추진하여 음용환경을 개선

2019년 노후 옥내급수관 교체 추진계획

Ⅰ		현 황

추진방향

○ 노후 옥내급수관 교체공사 적극적인 추진으로 음용환경 개선

○ 노후 공용급수관 교체공사와 관련된 비리 근절

- 공사 설계단계부터 자치구에 설계자문한 결과 내용 확인 철저

- 전문 감리원이 현장 직접 감리 및 완료된 부분 실측하여 정산

○ 노후 옥내급수관 교체공사 홍보 강화

- 자치구 주택·건축부서와 협력을 통하여 교체공사를 적극 유도

- 개별가구 우편발송, 자치구 소식지 게재, 반상회 활용 등 홍보

사업개요

○ 노후 옥내급수관 교체사업 현황           (’18. 12월말 기준)

구분	계	교체대상			멸실대상 주 택
		소계	교체완료	미교체
가구수	87,588	54,450	40,968	13,482	33,138

- 총 사업비 : 21,965백만원(’07. 7월부터 계속사업으로 추진 중)

○ 연차별 추진계획

구분	계	기교체	향후계획
		’07~’18	소계	’19년	’20년	’21년	’22년
가구수	54,450	40,968	13,482	5,000	3,000	3,000	2,482
사업비 (백만원)	21,965	14,697	7,268	2,688	1,620	1,620	1,340

Ⅱ		2018년 추진실적

사업소별 교체 실적

○ 우리사업소 실적 : 1,439가구(목표대비 63%)

(단위 : 가구, %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계 획	40,000	1,500	3,000	4,500	12,500	9,000	4,500	2,700	2,300
실 적 (비율%)	40,027 (100)	1,771 (118)	3,511 (117)	5,701 (126)	10,130 (81)	10,562 (117)	3,175 (71)	3,738 (138)	1,439 (63)

우리사업소 연도별 추진실적

연도별	목표(가구)	추진실적(가구)	달성율(%)	비 고
2007년	500	484	96.8
2008년	1,200	1,634	136.1
2009년	1,900	2,127	111.9
2010년	2,000	6,221	311.0
2011년	1,100	1,604	145.8
2012년	3,000	4,371	145.7	세대 : 2,383(55%) 공용 : 1,988(45%)
2013년	3,400	5,692	167.4	세대 : 2,171(38%) 공용 : 3,521(62%)
2014년	7,100	3,987	56.2	세대 : 2,112(53%) 공용 : 1,875(47%)
2015년	4,500	4,593	102.1	세대 : 1,793(39%) 공용 : 2,800(61%)
2016년	8,000	6,830	85.3	세대 : 1,209(18%) 공용 : 5,621(82%)
2017년	3,700	1,986	53.7	세대 : 836(42%) 공용 : 1,150(58%)
2018년	2,300	1,439	62.6	세대 : 577(40%) 공용 : 862(60%)
계	38,700	40,968	105.8

Ⅲ		2019년 추진계획

사업목표 : 5,000가구, 사업예산 : 2,688백만원

○ 배관 유형별 추진계획

(단위 : 가구, 백만원)

구 분	목표(가구)	지원예산	추진비율(%)
합 계	5,000	2,688	100
세대 급수관	3,500	2,088	70
공용 급수관	1,500	600	30

○ 분기별 추진계획

(단위 : 가구, 백만원)

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
추진 목표	5,000	750	1,500	1,500	1,250
지원 금액	2,688	403	806	806	673
추진비율(누계)	100%	15%	45%	75%	100%

○ 아파트 공용급수관 교체공사비 과다설계 방지를 위한 감독 철저

- 공사 설계단계부터 외부전문가 자문 및 전문설계사 참여로 검토 강화

- 기계설비분야 전문감리원이 현장 직접관리 및 시공연장도 반드시 확인

- 공사가 완료된 부분(수도관 연장)에 대하여 전문감리원과 사업소 직원이 합동으로 현장을 실측하고 준공 조치

○ 노후 옥내급수관 교체 전ㆍ후 설문조사 시행

- 대    상 : 노후 옥내급수관 교체 지원가구

- 조사방법 : 아리수 품질확인제 조사원을 활용하여 설문조사

※ 수질팀에서는 아리수 품질확인제 점검결과와 병행하여 설문조사표 작성

홍보 계획

○ 자치구 소식지, 지역신문 등을 적극적으로 활용하여 홍보

- 매월 자치구 소식지에 노후 옥내급수관 교체 홍보문 게재 요청

- 지역신문, 케이블TV 등을 활용 노후 옥내급수관 교체사업 홍보

○ 동 주민센터 등을 활용한 홍보ㆍ안내 강화(송파 27, 강동 18)

- 옥내급수관 지원 컨설팅 담당자가 동 주민센터를 직접 방문하여 홍보물 배부

- 자치구 민원실 및 건축부서에도 홍보물을 배부ㆍ비치

○ 사업소 관내 수도설비 공사업체를 활용한 홍보

- 162개 업체(송파 99개, 강동 63개)

○ 공용급수관 지원대상 아파트 공문 발송

- 36개 단지(송파 24개, 강동 12개)

○ 아파트 관리사무소를 직접 방문하여 홍보 활동 전개

- 노후 옥내급수관 교체 의사가 있는 아파트 단지를 직접 방문하여

사업설명, 의견청취 등 소통을 통하여 적극적인 사업추진 도모

- 장기수선계획수립시 노후 공용급수관 교체공사를 반영토록 홍보

○ 세대배관 교체 활성화 방안

계	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
3,500	200	300	400	400	400	300	300	400	400	400

- 상기와 같이 월별로 홍보 계획 가구수를 선정하여 개별가구 세대    배관을 직접 방문하여 안내문을 전달하면서 적극적으로 홍보

- 홍보 담당 : 옥내배관팀 4명(지원승인 담당 2명, 컨설팅 담당 2명)

- 아리수 토탈서비스 현장 방문시 노후 옥내급수관 교체토록 홍보

행정 사항

○ 교체실적 및 설문조사, 홍보실적은 매월 말일을 기준으로 하여 다음        달 1일까지 본부로 보고

○ 멸실되어 변경되는 사항에 대하여 교체대상 증ㆍ감 사항을 2019년

상·하반기(7,12월) 본부로 보고

붙임 : 홍보 안내문 1부.  끝.