문서번호	토목부-1353
결재일자	2019.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
윤효진		명경출	01/24 김영수
협조
	주무관		김종혁

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토보고

(태릉~구리IC간 광역도로확장)

2019. 1.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설사업관리용역 준공기한 연기 검토보고

(태릉~구리IC간 광역도로확장)

“태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계”의 용역 준공일이 변경됨에 따라 건설사업관리용역 기간을 연장하고자 검토 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계감리) 용역

○ 위    치 : 서울시 중랑구 묵동IC ~ 신내IC

○ 규    모 : 도로연장 L=1.38㎞, 폭 6차로 → 8차로

- 교량 확장(신내교, 신내1교), 교량 신설(RAMP-A교, RMAP-B교)

○ 용역기간 : 2018. 3.28. ~ 2019. 1.31.

○ 용 역 비 : 118,373천원

○ 계 약 자 : 주식회사 대한콘설탄트

□ 추진경위

○ '16.11.15. : 기본 및 실시설계 용역착수(도로계획과)

○ '18.02.23. : 실시설계 착수(토목부)

○ '18.03.28. : 건설사업관리(설계감리) 용역 착수

○ '18.05.04. : 실시설계(안) 노선 확정 자문회의

○ '18.05.31. : 기본 및 실시설계 연기(당초 18.5.31.~18.12.31.)

○ '18.06. ~ 07. : 특정제품(공법)선정심사 개최(2회)

○ '18.08.23. : 실시설계 VE심사

○ '18.08.29. : 실시설계 건설기술심의소위원회 개최

○ '19.01.     : 설계안정성 검토 자문

□ 연기요청사항

○ 준공기한 연기 : 334일(계약금액 변동없음)

- 계약기간 : 당초 2019. 1.31. → 변경 2019.12.31.

○ 연기사유 : 기본 및 실시설계 준공기한이 연기됨에 따라 건설사업관리(설계감리)용역을 연기코자 함.

○ 귀책소재 / 지체상금 : 서울시 / 부과없음

□ 조치의견

○ “태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계” 준공기한이 당초 2018.12.31. → 2019.12.31.로 변경됨에 따라 건설사업관리(설계감리) 용역의 준공기한을 당초 2019. 1.31. → 2019.12.31.로 연기하여 용역을 수행코자 함.

붙임 1. 합의각서 1부.

2. 건설사업관리(설계감리) 공문 1부.

3. 기본 및 실시설계 용역 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.