문서번호	건축부-1008
결재일자	2019.1.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		유현수	01/24 임인구
협 조

『서울애니메이션센터 철거공사 건설폐기물 처리용역』

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『서울애니메이션센터 철거공사 건설폐기물 처리용역』

실정보고에 대한 검토 보고

『서울애니메이션센터 철거공사 건설폐기물 처리용역』관련, 임목폐기물 추가에 따른 실정보고가 건설사업관리단으로 부터 제출되어 검토보고 드림

1		공사개요

○ 위    치 : 중구 소파로 130,126(예장동 8-20외 3필지)

○ 건설폐기물 처리 규모 : *************

- ***************************************************

○ 용역기간 :************************** / ************************

○ 용 역 비 : ************ / ***********

○ 건설사업관리용역사 : ㈜혜원까치종합 건축사사무소

○ 용 역 사 : 제일이앤디(주)외 1

2		추 진 경 위

‘18. 12. 24.  : 건설폐기물 처리용역 계약 체결

‘18. 12. 27.  : 용역 착수

‘19.  1. 24.  : 임목폐기물 추가 실정보고(건설사업관리단  →  건축부)

3		실정보고 내용

관련문서 : 혜원까치 애니센터-2019-012(‘19. 01. 22.)

실정보고 사유

- *************************************

관련규정 : 공사계약일반조건 제6절

실정보고 내용

실정 보고	변 경 전	변 경 후	용역비	비고
**************	-	********** ********	**********	용 역 준공시 정산예정

4		건설사업관리단 검토의견

임목폐기물 추가(처리·운반) 실정보고 승인 타당함

5		처리의견

건설사업관리단의 임목폐기물 추가 실정보고 사항에 대하여 승인 통보

설계자문위원회 자문결과에 따라 변동될 수 있음을 통보코자 함.

붙임 : ********** 각 1부.(건설사업관리단).  끝.