문서번호	설비부-1179
결재일자	2019.1.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		여인웅	01/25 임정규
협조

노들섬 특화공간 조성 사업

전기 및 통신 공사 3차 계약 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

도시기반시설본부

(설 비 부)

노들섬 특화공간 조성 사업

전기 및 통신공사 3차 계약 검토 보고

『노들섬 특화공간조성 사업』과 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 전기 및 통신공사의 3차 계약 요청에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 공사(전기 및 통신)

□ 공사규모 : 지상3층, 연면적 9,385㎡

□ 공사기간 : `17.11.16. ~ `19.8.31.

□ 도 급 비 : 전기 – 2,870백만원

통신 -    873백만원

□ 계 약 자 : 전기 - ㈜코에버정보기술 외 2

통신 - ㈜신성글로벌네트워크

□ 건설사업관리단 : ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 외 1

Ⅱ		검토내용

□ 관련근거

○ ’19.1.24 : 노들섬 특화공간 조성 전기 및 통신공사(3차) 계약요청의 건(유탑노들 제19-21호)

□ 3차 계약 시행 계획

○ 선행공정(건축)의 공정진행에 맞춰 전기 및 통신공사 시행을 위해 3차수 계약하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

<전기공사>

○ 주요 공사 내용(3차수)

(단위:천원)

구 분	주요 공사내용	금 액	비고
수변전설비	전기실 배관 배선작업	33,394
전력간선설비	전력 간선 설비 배관 배선 작업	449,079
동력설비	동력설비 배관 배선 작업	71,969
케이블 트레이설비	케이블 트레이 설치	25,126
냉난방설비	냉난방 설비 배관 배선작업	11,393
피뢰및접지설비	피뢰설비 및 접지설비 작업	27,545
전열 설비	전열 케이블 및 배선작업	42,380
전등 설비	조명등 배관 배선 및 등기구 설치	193,388
조명제어설비	조명등 제어 설비 작업	5,981
경관조명설비	경관조명 시설 작업	261,722
소방설비	자동탐지설비 및 유도등 설비	103,271
소 계		1,225,248
제 경 비	부가세 포함	711,801
도 급 비		1,937,049

○ 전기공사(3차수) 계약요청 현황

(단위:원)

구 분		금 액	비고
도급비	총차	2,870,149,380
	3차	1,937,049,380	금 차

○ 공사기한

- 총 차 : ‘17.11.16. ~ ’19. 05.15.

- 3 차 : 착공일로부터 ~ ‘19. 05.15.

<통신공사>

○ 주요 공사 내용(3차수)

(단위:천원)

구 분	주요 공사내용	금 액	비고
통합배선설비	통신장비 및 배관 배선작업	145,399
CATV 설비	CATV 장비 및 배관 배선 작업	145,877
케이블트레이	케이블 트레이 설치 작업	18,822
방송설비	방송장비, 스피커 및 배관배선	34,113
AV설비	AV장비 및 배관배선	27,748
CCTV설비	CCTV 배관배선 작업	13,150
비상벨설비	비상벨장치 및 배관 배선작업	13,819
주차관제 설비	주차관제 장치 배관배선 작업	7,893
소 계		406,821
제 경 비	부가세 포함	210,396
도 급 비		669,018

○ 통신공사(3차수) 계약요청 현황

(단위:원)

구 분		금 액	비고
도급비	총차	873,217,538
	3차	617,217,538	금 차

○ 공사기한

- 총 차 : ‘17.11.16. ~ ’19. 05.08

- 3 차 : 착공일로부터 ~ ‘19. 05.08.

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 전기 및 통신공사(3차) 계약변경 요청에 대한 검토결과, 위 검토 내용과 같이 3차수 계약을 시행하는 것이 타당하다고 사료됨.

Ⅲ		조치의견

○ 건설사업관리단 3차수 계약 요청사항 검토 결과 건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 총무부에 3차수 계약의뢰 하고자 함.

붙 임 : 관련문서 각 1부.  끝.