투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	계약변경(1차) - 의뢰[2019년 교통안전시설물 설치 및 보수공사]

1. 신흥트래픽 신흥-1901-02(2019.1.25.)호, 기전과-449(2019.1.24.)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거하여 우리사업소에서 시행중인“2019년 교통안전시설물 설치 및 보수공사”의 계약변경을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 교통안전시설물 설치 및 보수공사

나. 도 급 자 : ************

다. 공사기간 : 2019. 01. 10. ∼ 2019. 01. 31.

라. 계약금액 : 금20,273,000원

마. 변경사유 : 교통신호기 유지보수 공사(연간단가)계약전까지 교통사고 민원처리 및 공사(경정비 외) 등을 위해 준공기간 변경 변경.

※ 단, 교통신호기 유지보수공사(연) 계약후 지체없이 물량변경(설계변경) 후 준공

바. 변경내용

계약기간(당초) : 2019. 1. 10. ~ 1. 31.

계약기간(변경) : 2019. 1. 10. ~ 3. 20.

※ 물량 및 공사비(증·감) 변경없이 공사기간 연장

사. 예산과목

교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

붙 임  1. 공사계약변경 보고서 1부.

2. 계약내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	이군재		기전과장	01/28 곽희영
협조자	주무관	안재윤		주무관	유정하
시행	기전과-492	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(6)