투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	납품기한 연장 (장애인용 승강기 20인승)

우리 센터에서 추진중인“관리동 승강기 및 실험실 증축공사”와 관련 관급자재(승강기)에 대하여 원활한 사업추진을 위해 아래와 같이 납품기한을 연장하고자 합니다.

1. 건    명 : 관급자재구매(장애인용 승강기 20인승)

2. 금    액 : 금66,523,000(금육천육백오십이만삼천원)

※ 조달수수료 341,260원 별도

3. 계약일자 : 2018. 10. 22.(계약번호 00186132701호)

4. 계약업체 : 주식회사 세명엘리베이터 (대표 이철영)

5. 계약방법 : 조달청3자단가

6. 납품기한

구 분	1차 연장	2차 연장	비 고
납품기한	2018.12.21. ~ 2019.01.31.	2019.01.31. ~ 2019.02.15.

7. 예산과목 : 중랑물재생센터공통분야유지보수, 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

8. 변경사유 : 한국승강기안전공단의 승강기 사용검사 일정(2019.02.15.)에 따라 납품기한을 연장하고자 함.  끝.

주무관	양희원		관리과장	01/30 이희신
협조자
시행	관리과-1179	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화		/전송		/		/	부분공개(5)