문서번호	도시철도토목부-1114
결재일자	2019.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	01/31 정대현
협 조
	주무관			정중규
	주무관			김근수

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

관급자재(레일) 및 접착절연레일 추가 반영 검토

2019. 01.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

관급자재(레일) 및 접착절연레일 추가 반영 검토

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』시행중 레일용접시 레일 줄임량 미 반영 및 H5정거장 회차선 구간에 접착절연레일 설치 요청에 따른 부족 수량에 대한 책임건설사업관리기술자 보고에 따라 아래와 같이 검토 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 하남궤2-19-084호(2019.01.24.) 하남선 궤도2공구 레일 및 절연레일 수량 검토 실정보고 제출

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

❍ 공사구간 : 경기도 하남시 덕풍동 ~ 경기도 하남시 창우동

❍ 계약기간 : 2018.11.05. ~ 2019.11.04.

❍ 계 약 자 : 화성궤도(주)

❍ 건설사업관리 : ㈜신승엔지니어링외 3사

❍ 계약금액 : 4,585,827,000원

Ⅲ		현 황

❍ 관급자재(레일) 구매 수량 부족(총 구매 수량 : 562개)

- 레일가스압접시 레일 줄임량(24mm~30mm이상) 미 반영

· 레일의 구분 : 상선 좌측,우측레일, 하선 좌측,우측레일

· 562개 / 4개선 ≒ 141개(예 : 상선 좌측레일 141개 필요)

· 141개 * 30mm = 4.23m 부족

∴ 4개선에 각각 4.23m 부족(레일 4개 부족)

❍ H5정거장 회차선 접착절연레일 추가 설치 요청

- 신호분야 건설사업관리기술자로부터 안전거리 확보 및 안전성 확보를 위한 접착절연레일 추가 설치 요청

Ⅳ		건설사업관리기술자 검토의견

❍ 레일부설도 및 레일용접 상세도 작성 결과 레일(보통레일) 4개 부족

- 레일용접시 줄임량 미 반영

- 레일용접 상세도(별도첨부)

❍ 안전거리 확보 및 안전성 확보를 위한 접착절연레일 추가 설치 요청

- 하남선시스템통합감리단 ⇒ 궤도분야 건설사업관리단

절연레일 용접도

❍ 공사비 검토

구 분	당 초		변 경		증·감		비고
	수량	금액(원)	수량	금액(원)	수량	금액(원)
접착식절연레일	16	23,369,000	20	29,211,000	4	5,842,000	재료비 공사비포함
일반레일	316	89,281,000	320	90,456,000	4	1,175,000	공사비 (자재:관급)
경두레일	246		246		-		변경없음
제 경 비		43,930,000		45,663,000		1,733,000
합 계		156,580,000		165,330,000		8,750,000

Ⅴ		조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자 의견과 같이 레일(보통레일) 4개 추가 및 접착절연레일 추가 구매하여 우선 시공하고,

❍ 레일(보통레일) 구매는 기 계약된 관급자재(레일) 구매시 추가 구매

❍ 접착절연레일은 공사에 반영하여 추가 구매하고 변경된 내역(증 8.8백만원)은 추후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

- 사업비 : 증 8,750천원

붙임 : 관련문서 사본 1부.  끝.