문서번호	기술심사담당관-2501
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(4,5)
방침번호

			시 민
주무관		기술지원팀장	기술심사담당관
이주영		조임남	02/01 김홍길
협조

건축공사장 안전자문단

자문회의 결과보고(2차)

2019. 2.

기술심사담당관

건축공사장 안전자문단

자문회의 결과보고(2차)

용산역전면 1-1구역(용사의집) 재개발사업과 관련, 흙막이 설계 적정성 검토 등 굴착공사 중 안전관리를 위한 건축공사장 안전자문단 자문회의(2차) 결과를 보고드림.

□ 개   요

○ 일    시 : 2019.1.29.(화) 15:00~16:30

○ 장    소 : 용산역전면 1-1구역(용사의집) 재개발사업 현장사무실

○ 참 석 자

- 안전자문단 : 남순성 위원, 오해진 위원, 김명철 위원, 장덕배 위원

- T/F팀 : 기술심사담당관, 도로관리과장, 시설안전과장, 도시활성화과 담당팀장, 용산구 도시계획과 담당팀장 등

- 현장관계자 및 인접건물(드래곤힐스파)관계자 등

○ 회의내용

- 15:00~15:40 : 자문의견(1차) 조치결과 피드백

- 15:40~16:30 : 공사장 점검 및 인접건물(드래곤힐스파) 현장 확인

※ 드래곤힐스파측 피해민원 제기(`19.1.19.)

CIP 케이싱 인발시 발생한 진동으로, 인접건물 지하 화장실 벽면에 균열이 발생, 오물이 유입되고 있으며 악취로 인해 영업에 지장이 있음

□ 공사 진행현황

○ 흙막이 벽체 시공중 : 2~4공/일

- CIP 57공 완료(총415공, `19.1.29.기준)

□ 위원별 주요의견

분야	위원명	주요 자문의견
토질 및 기초	남 순 성 위원	○ 케이싱 인발시 진동이 수반되는 방법(바이브로해머)을 사용한다면 인접건물 거주민들은 상당한 불안감을 느낄수 있으므로 반드시 유압식 인발방식을 사용할 것 ○ 민원인측과 합의하에 계측기를 설치하고 안전점검 및 진단 결과에 따라 구조보강을 실시 후 스파건물 인접구간의 굴착을 시행할 것
	오 해 진 위원	○ JSP공법 시공시 30m심도의 취수공에 스라임이 유입될 가능성이 매우 크므로 이에 대한 대책 필요 ○ 천공후 케이싱 인발시 진동을 주지 않거나 최소화 할 수 있는 방법에 대한 검토 필요
토목구조	김 명 철 위원	○ 인접건물에 직접적으로 영향을 줄 수 있는 공사이므로 분쟁확대 방지를 위해 하루전 공사내용을 알려 협조를 구하고, 우선적으로 공사장 및 인접건물의 안전과 사용성을 확보할 수 있도록 조치 필요 ○ 실시간 자동계측을 실시하고 그 결과값을 양측이 공유하여 신뢰를 확보할 수 있도록 할 것
건축시공	장 덕 배 위원	○ CIP천공 작업심도가 깊어 천공홀의 수직도가 정확하지 않을 경우 CIP간 갭(Gap)이 발생해 차수효과 감소 및 흙막이 벽체 강성저하 우려가 있으므로 천공홀 수직도 관리 필요 ○ 인접건축물의 공사로 인한 영향을 확인하기 위해서는 계측기의 설치위치가 중요하므로 양측의 관련전문가 입회하에 계측기 설치를 신속하게 진행할 것
T/F	기술심사담당관	○ 현장에서 확인한 스파건물 지하층 화장실내 오물 유입과 관련, 공사중 CIP 진동 등으로 인해 정화조가 파손되어 오수가 유입되었을 개연성이 있으므로 원인을 면밀히 조사하여 대책을 수립하고 유사사례 방지를 위해 현장관리에 유의할 것 ○ 경험이 많은 전문건설업체에서 책임을 지고 시공할 수 있도록 하도급관리 및 기술자에 대한 관리를 철저히 하고, 공해물질 배출이 최소화되도록 최신 장비 등을 사용하여 관리 필요

□ 향후계획

○ 관련부서(T/F팀)에 자문의견 통보 및 지속적인 피드백 실시

○ 건축공사장 안전자문단 현장점검(3차) 실시 : `19. 2월중

붙 임 : 안전자문단 자문의견서 1부.  끝.