투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 계약의뢰(돈화문민요박물관건립 기계공사-공기조화기)

우리부에서 시행중인『돈화문민요박물관건립 기계공사』관급자재에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 내용

(단위 : 원)

품목		계약금액				계약기한	납품요구번호	계약번호
		품대	조달수수료	소계	증,감
공기조화기	변경전	98,681,000	506,230	99,187,230	감8,084,920	’19.4.07	12-18-2-04898-00	00177050900
	변경후	90,613,000	489,310	91,102,310		변경없음

나. 변경 사유 : 설계용량에 적정하게 충족하는 공기조화기 재선정

라. 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 돈화문 전통문화시설 건립, 시설비.

마. 계약업체 : ㈜ 에스앤에이치이앤지  대표  한정흠

붙임 : 관급자재 변경 검토 보고

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/01 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-1565	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)