문서번호	시설개선과-1004
결재일자	2019.2.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호		윤정한	02/01 박영준
협 조
	운영기획과장			김남대
	주무관			이경수

- 2019년 잠실야구장 환경개선공사 -

추가공사에 따른 계약금액 조정 검토보고(1회)

2019. 2

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2019년 잠실야구장 환경개선공사 -

추가공사에 따른 계약금액 조정 검토보고(2회)

『2019년 잠실야구장 환경개선공사』와 관련 구단의 추가공사 요청에 따른 검토사항 및 계약금액 조정에 대한 보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 노후 외야 안전난간 보수 70개소

- 노후 관람석(레드석) 등·좌판 교체 6,113개소

- 내부 복도 바닥재 개선 550㎡

- 관람석 통로 및 계단 바닥 개선 6,866㎡

- 강화유리 안전난간 설치 100m(조달구매 설치)

○ 사 업 비 : **************

- 도급비 : **************

- 관급비 : ***********(강화유리 안전난간)

○ 공사기간 : 2019. 1.16 ~ 3.18

○ 시 공 사 : ***************

○ 추진경위

- 2018.  12. 18    발주방침

- 2019.  01. 04    공사발주

- 2019.  01. 16    공사계약 및 착공

- 2019.  03. 18    준공예정

계약금액 조정 추진근거

○ 잠운본 제2019-1호(2019. 1. 4)

- 좌석세분화를 위한 레드지정석 일부 색상변경 요청

○ 잠운본 제2019-3호(2019. 1.28) : 추가공사 요청

연번	요 구 사 항	사 유
1	사진기자실(2개소) 환경개선	사진기자실의 노후(벽체, 바닥, 테이블 등)로 사용자들의 불편사항 제기로 개선하여 쾌적한 취재환경 제공
2	관람석 앞 통로 논슬립 시공	관람석 앞 통로에 논슬립 시설 설치로 안전성 강화
3	장애인석 앞 간이테이블 설치	장애인 관람객들에게 편의시설 제공
4	관람석 구분 출입문 설치	이용객들의 안전사고 예방을 위한 출입문 설치
5	악세스플로어 교체	내부 복도 바닥재 시공구간 중 노후 악세스플로어 교체필요
6	원정팀 락커 관물함 이설	원정팀락커내 바닥재의 정밀시공을 위해 관물함 이설필요
7	강화유리 안전난간 추가설치	3루측(중2층) 미반영 구간 추가설치 요청

검토내용

○ (레드)관람석 일부 색상 변경

- 교체대상인 (레드)관람석 6,113석중 응원석 주변 1,686석은 다크오렌지색으로 변경(금액 변경없음)

○ 요구사항 추가공사비

- 도급비

공 종 명	규 격	수 량	단 위	금 액(원)
사진기자실 1	리모델링	1	개소	**********
사진기자실 2	리모델링	1	개소	**********
관람석 앞 논슬립		3,701	㎡	**********
장애인석 간이테이블		2	개	*********
관람석 분리 출입문	철재 출입문	4	개소	*********
내부복도 악세스플로어		25	㎡	*********
원정팀 락커 관물함 이설		1	식	*********
소계				***********
제경비				**********
합계				***********

- 관급비

공 종 명	규 격	수 량	단 위	금 액(원)
강화유리 안전난간	H=600mm	2	m	*******
강화유리 안전난간	H=1200mm	9	m	*********
소계				*********
조달수수료				******
합계				*********

사진 기자실	관람석앞 논슬립 시공
장애인석앞 간이테이블 설치	관람석 분리 출입문
내부복도 악세스플로어	원전팀 락커 관물함

계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*************	*************	***********
도급액	공 급 가 액	*************	*************	***********
	부가 가치세	***********	***********	**********
	계	*************	*************	***********
관급자재비		**********	**********	*********

조치의견

○ 위와 같이 구단의 요구사항을 공사에 반영, 프로야구팬들에게 쾌적한 관람환경 제공과

○ 시공사와 변경 계약 후 2019.3.18일한 공사를 완료하여 2019년 프로야구 시즌 대비

덧붙임  1. 구단 공문 2부.

2. 설계변경내역서(1회) 1부.

3. 설계변경도면(1회) 1부.  끝.