문서번호	급수운영과-2243
결재일자	2019.2.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	남부수도사업소장
류태현		이성환	02/07 전영석
협조
	주무관		이일로

『2019년 독산배수지외 8개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진계획

2019. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2019년 독산배수지외 8개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진계획

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 독산배수지외 8개소 상수도시설물에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검을 실시하여 시설물의 안전성을 확보하고, 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전진단	정밀점검
법적조항	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	•시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
대상시설	•1종시설물	• 1,2종시설물

□ 대상 시설물

❍ 대상 : 9개소(정밀안전진단 4개소, 정밀점검 5개소)

구 분	시설물명	용 량	준공년도	시 설 개 요	비 고
정밀안전 진단 (4개소)	독산배수지	22,000㎥	1982년	철근콘크리트구조물 : 2지
	낙성대배수지	60,000㎥	1990년	철근콘크리트 구조물 : 4지
	신림9배수지	2,000㎥	1988년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	낙성대(배)가압장	180,000㎥/일	1990년	철근콘크리트 구조물	내진성능 평가대상
정밀점검 (5개소)	선우배수지	6,000㎥	2005년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	금천배수지	60,000㎥	2000년	철근콘크리트 구조물 : 3지
	금천(배)가압장	10,200㎥/일	2000년	철근콘크리트 구조물
	봉천11(대)배수지	3,000㎥	2006년	철근콘크리트 구조물 : 2지
	봉천11(배)가압장	8,000㎥/일	2006년	철근콘크리트 구조물

□ 추진목적

❍ 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적·기능적 결함과 내재되어

있는 위험요인 발견, 안전성 확인하고 보수·보강 및 조치방안을 제시

❍ 보수·보강 등 시설개량 추진으로 시설물의 안전을 확보하는데 있음

Ⅱ		추진계획

□ 추진기간 : 착수일로부터 2019.12.20.까지

□ 사 업 비

❍ 소요예산 : 146,537천원

❍ 예산과목(아리수올림터·배수지 등 시설물 유지관리-상수도시설물안전진단)

－ 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체유지비(수선유지비)

□ 용역방법

❍ 수리시설분야 또는 종합분야의 안전진단 전문용역 업체 계약 시행

❍ 총액입찰, 사업수행능력 평가(PQ) 심사 대상 용역

□ 정밀안전진단 과업내용

❍ 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

❍ 기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력을 확인

❍ 현장조사

❍ 제반관련 시험실시 – 비파괴 현장 시험 등

❍ 시설물별 조사결과 분석

❍ 종합적인 상태평가 : 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

－ 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

－ 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과 분석

－ 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

❍ 내진성능 평가대상 : 낙성대(배) 가압장

❍ 안정성평가

❍ 보수·보강 공법 및 개략 공사비 제시

❍ 보고서 작성 및 기타(유지관리 방안 제시)

Ⅲ		행정사항

□ 기술용역 사업수행능력 세부평가기준 협의--------------‘19. 02월

－ 기술용역 사업수행능력 세부평가기준 협의요청(사업소 → 기술심사담당관)

－ 구매규격 사전공개 요청(급수운영과 → 행정지원과)

□ 용역발주---------------------------------------‘19. 02월

－ 용역명 : 2019년 독산배수지외 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

－ 2019년 상·하반기 배수지 청소일정과 병행 시행

□ 용역 단계별 보고회----------------------------‘19. 03~11월

－ 착수보고회 : 착수일로부터 30일 이내

－ 중간보고회 : 현장조사 완료 시점

－ 최종보고회 : 준공 60일 전

□ 용역 준공(용역 결과 보고 및 FMS 실적 입력)------------‘19. 12월

－ 기술용역 성과품 제출 : 서울도서관, 상수도본부(급수운영과)

따로붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 2019년도 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 1부.  끝.