투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	운영기획과장
(경유)
제목	2019년 잠실야구장 환경개선공사 계약금액 조정 시행(1회)

1. 시설개선과-1004(2019.02.01)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『2019년 잠실야구장 환경개선공사』에 대하여 다음과 같이 계약금액 조정(1회)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 잠실야구장 환경개선공사

나. 도 급 자 : *************

다. 공사금액 : *****************************

라. 공사기간 : 2019.01.16 ~ 03.18

마. 공사내용 : 노후 외야 안전난간 보수 26개소, 노후 관람석(레드)등·좌판 교체 6,113개소, 내부 복도 바닥재 개선 550㎡, 관람석 통로 및 계단 바닥개선 6,866㎡ 등

바. 계약금액 조정내역

구 분	당초 금액	변경 금액	증 ․ 감	비 고
도 급 비	**************	**************	************	· 추가공사 발생 등

사. 예산과목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충(체육진흥기금), 야구장 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

덧붙임  1. 계약금액 조정 검토보고서 1부.

2. 설계변경내역서(1회) 1부.

3. 설계변경도면(1회) 1부.

4. 합의서(1회) 1부.

5. 검증확인서 1부.  끝.

〔운영기획과 이경수 / 품의번호 :     / 2019.01.08〕

	서울특별시체육시설관리사업소장
★주무관	오상호		주무관	이경수		시설개선과장	윤정한		체육시설관리사업소장	02/07 박영준
협조자	주무관	이호경		주무관	송미자		운영기획과장	김남대
시행	시설개선과-1071	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8818	/전송	02-2240-8777	/		/	부분공개(5)