투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	별내선(8호선연장) 1공구 건설사업관리단장 귀하
(경유)
제목	별내선 1공구 휴일 작업계획 승인 통보(2019년 2월)

1. 별내 감1-19-59호(2019.01.28.), 쌍건별내 제2019-39호(2019.01.28.)와 관련입니다.

2.「별내선(8호선연장) 1공구건설공사｣ 와 관련한 2019년 2월 휴일 작업계획(‘19.2.9~2.23)에 대하여   공사계약 일반조건 제5절 6, 서울특별시 공사계약 특수조건 제11조에 따라 아래와 같이 승인하니   공사 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 감리원 휴일 근무 승인 내용

작 업 일	작업 위치	작 업 내 용	관리자
			건설사업 관리기술자	시공사
2월09일 (토)	본선1-1 본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-1구간 우측파일 천공 및 항타 본선1-1구간 복공판 설치 본선1-2구간 토공 반출작업 본선1-2구간 3, 4단 띠장 설치 본선1-2구간 3, 4단 강재토류판 설치 본선1-3구간 하수박스 이설작업 본선1-3구간 토공 반출작업 본선1-3구간 주형보 및 복공판 설치 정거장구간 기존 하수박스 깨기 및 되메우기	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
2월16일 (토)	본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-2구간 토공반출 작업 본선1-2구간 4단 버팀 설치 본선1-3구간 하수박스 이설작업 본선1-3구간 토공 반출작업 본선1-3구간 주형보 및 복공판 설치 정거장구간 우측파일 천공 및 항타	******	****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
2월23일 (토)	본선1-2 본선1-3 정거장	본선1-2구간 토공 반출 작업 본선1-2구간 5단 띠장 설치 본선1-2구간 5단 강재토류판 설치 본선1-3구간 하수박스 이설작업 본선1-3구간 토공 반출작업 본선1-3구간 주형보 및 복공판 설치 정거장구간 우측파일 천공 및 항타	******	****** ****** ******* ****** ****** ****** ****** ******

나. 휴일 근무 승인조건 및 업무지시

○ 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자(감리원) 대가는 휴일작업계획의 적정성 여부 검토의견서와 같이 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)에 따라 지급

○ 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

○ 소음 · 비산먼지 발생 · 통행불편 등과 같은 시민불편이 발생하지 않도록 하고 보행자 도우미, 교통 신호수 배치 등 공사장 주변 안전사고 예방에 만전을 기할 것

○ 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

○ 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리, 비산먼지 발생저감 등 현장관리 철저

○ 건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

○ 작업구간 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등 정기순찰 점검실시

○ 휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업 시행토록 할 것

○ 소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원발생 관리철저

○ 개착구간 도로안전시설물 관리 및 교차로, 횡단보도 구간 안전관리 철저

○ 건설기계 및 중량물 취급 작업시 감리 확인 및 안전수칙 준수 철저

○ 휴일작업시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리 작업관리 철저

○ 동절기 대비 강설 및 우기 후 결빙 등으로 사고 및 민원이 발생되지 않도록 관리 철저

○ 소음, 진동, 비산먼지 발생 등을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원이 발생하지 않도록 관리철저

○ ‘건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목’ 준수 철저

붙임 : 건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박성준		신교통과장	성원배		도시철도사업부장	02/08 최병훈
협조자	주무관	박노성
시행	도시철도사업부-1093	(		)	접수		(		)
우			/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7152	/전송	02-772-7305	/		/	부분공개(6)