문서번호	기전과-1215
결재일자	2019.2.8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		서수일	02/08 이학구
협 조

서빙고지하차도 배수펌프 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

서부도로사업소

(기전과)

서빙고지하차도 배수펌프 교체계획

장기사용으로 노후된 지하차도 배수펌프를 교체하여 우기철 고장에 따른 펌프 가동정지 등 안전사고 위험요소를 사전에 정비하여 수방 대비에 만전을 기하고자 함.

□ 사업근거

○ 물품관리법 시행규칙 제25조 (물품의 내용연수)

○ 조달청 고시 내용연수 11년이 경과된 배수펌프 교체

□ 지하차도 배수펌프 현황

시설명	펌프	토출량 (㎥/min)	양정 (m)	설치년도	비고
퇴계로	15hp×3대	2.1	12	2018
	7.5hp×1대	1.2	12	2018
서빙고	20hp×2대	2.8	15	2006	교체 대상
	7.5hp×1대	1.0	15	2006
증 산	40hp×2대	1.0	11.5	2016
	50hp×1대	11.3	11.5	2016
성 산	15hp×2대	2.3	12	2016
	20hp×1대	4.4	12	2016
모래내	15hp×3대	2.3	12	2016
	5hp×1대	0.65	12	2016

□ 교체사유

○ 배수펌프 내구연한 경과로 노후화되어 배수효율 저하

○ 배수배관 및 부속품등의 부식으로 인한 유지관리비용 과다발생

□ 사업개요

○ 사업명 : 서빙고지하차도 배수펌프 제작구매 설치

○ 예산현황 : 35,000천원

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 지하차도 노후배수시설

개량사업, 시설비

○ 사업내용 : 배수펌프 3대 교체

교체대상	용 량	규 격	교체사유	비 고
서빙고지하차도	20hp×2대	2.8㎥/min, 15m	내용연수경과로 성능저하
	7.5hp×1대	1.0㎥/min, 15m	내용연수경과로 성능저하

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2019. 5.

○ 현장 위치 및 사진

□ 추진계획

○ 2019.02 : 배수펌프 교체계획서 첨부 예산 재배정 요청

○ 2019.02 : 공공구매종합정보망(smpp.go.kr) 이용 지명경쟁 대상

업체 추천 요청

※ 신청자격 : 한국펌프공업협동 조합으로부터『우수조달공동상표』‘펌프류’로 등록된                        품목으로 가입된 서울/경기에 위치한 회사

○ 2019.02 : 계약심사 의뢰

○ 2019.02 : 계약 의뢰 (총액제한, 공공구매종합정보 이용 추천업체 대상)

○ 2019.05 : 시험운전 및 준공.  끝.