문서번호	조경과-1898
결재일자	2019.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
이진범	송동명	代김호석	02/08 최윤종

2019년 지정보호수 유지관리사업 시행계획

2019. 02.

푸른도시국

조  경  과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 지정보호수 유지관리사업 추진계획

지역의 역사성과 상징성을 간직하고 있는 보호수에 대해 외과수술, 병해충방제 등 유지관리를 통해 지속적인 생장을 도모하고, 보호수 주변 정자마당을 조성하여 지역주민의 휴식과 만남의 장소로 제공하고자 함

1		추 진 방 향

❍ 보호수의 지속적인 생육이 가능토록 주변 환경 개선

❍ 보호수 정자마당 조성으로 지역 커뮤니티 활성화 기여

❍ 보호수 생육모니터링(시범사업)을 통해 체계적인 관리 시행

2		사 업 개 요

❍ 현    황 : 종로구 궁정동 55-3번지 회화나무 등 208주

❍ 사업기간 : 1999년 ~ 계속

❍ 사업내용

‣ 보호수 관리 : 병해충방제, 외과수술, 수형조절 등 생육환경 개선

‣ 정자마당 조성 : 보호수 주변 쉼터조성으로 만남과 휴식의 장소 제공

❍ 총사업비 : 8,355백만원(‘19년 이전 5,039, ‘19년 1,600, ’19년 이후 1,716)

3		2019년 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 2 ~ 12월

❍ 사업대상 : 24개 자치구 189주

❍ 사업금액 : 1,600백만원(시설비)

❍ 사업내용

‣ 보호수 유지관리 및 생육환경 개선

‣ 보호수 정자마당 쉼터 조성

‣ 보호수 생육 모니터링(시범사업)

❍ 예산과목

‣ 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충, 지정보호수 유지관리(마을정자목 쉼터조성), 시설비(401-01)

4		세부 사업내용

❍ 지정보호수 유지관리 : 400백만원

‣ 사업대상 : 종로구 궁정동 55-3 등 189주

‣ 내    용 : 외과수술, 수형조절 및 고사지 제거, 영양공급, 안내판 설치

❍ 보호수 생육 모니터링[시범] : 비예산(혁신기술 공공테스트베드 사업)

‣ 사업대상 : 보호수 약 70주

‣ 내    용 : 척박한 환경에서 생육하는 보호수에 스마트센서를 설치하여

원격으로 생육상태 확인 및 체계적인 관리 시행(붙임자료 참고)

※ 혁신기술 공공테스트베드 사업(경제진흥본부 경제정책과)

: 중소·벤처기업의 혁신기술에 대해 서울시정과 관련된 공공분야에 시범도입

기회를 제공하여 시장형성 및 기업성장을 도모하는 R&D 지원사업

스마트센터 모니터링 개념도	스마트센서(두께0.1mm)

❍ 지정보호수 정자마당 조성 : 1,200백만원

‣ 사업대상 : 중랑구 면목동 91-49

‣ 내    용 : 토지(123.6㎡) 및 건물(1동) 보상 및 공원조성

	보호수 보상대상지
정자마당 조성대상지 위치도	정자마당 조성대상지 현황사진

5		추 진 방 법

[지정보호수 유지관리]

❍ 수목에 대한 병징, 수세쇠약 원인 등을 전문가 진단·처방 시행

❍ 유지관리 공종별(병행충방제, 영양공급 등) 적기에 작업 시행

❍ 단순공정 및 소액 등을 고려하여 사업비 일괄 재배정하여 자체 설계로 시행, 설계심의는 생략(필요시 조경과 협의후 도면작성용역 시행)

❍ 사유지내 보호수의 경우 소유자와 사전 협의하여 민원방지

[보호수 생육 모니터링]

❍ 도로변이나 골목길 등 생육환경이 척박한 보호수를 대상으로 시행

❍ 자치구 대상지 제출 후 사업시행자와 현장조사 거쳐 사업대상 확정

❍ 모니터링 세부 방법 및 자치구 담당자 교육은 별도 시행(3월중)

❍ 연내 사업 종료 후 사업 결과 평가하여 사업 지속여부 결정

[지정보호수 정자마당 조성]

❍ 도시계획시설(공공공지) 결정 등 관련 절차 적기 이행

❍ 감정평가, 토지 보상 등이 원활히 추진될 수 있도록 소유자 및 보상 관련 부서와 긴밀한 협조체제 유지

❍ 토지 매입 후 소유는 시소유(서울특별시)로 등기

❍ 주변현황, 보호수 생육환경 등 정확한 분석을 통해 토지가 효율적으로 이용될 수 있도록 주민의견 수렴과정을 거쳐 전문가 등의 자문·설계를 통해 조성 추진

[사업추진 일정]

지정보호수 유지관리	지정보호수 정자마당 조성
‣‘19. 2. : 사업비 재배정 ‣‘19. 2. : 설계시행 ‣‘19. 3. ~11. : 공사시행 ‣‘19.11. : 준공보고 ※ 공종별 적기에 유지관리 시행	‣‘19. 2. : 토지․건물주 보상협의 ‣‘19. 4. : 도시계획시설(공공공지) 지정 등 도시계획 절차 이행 ‣‘19. 5. : 지적측량, 보상감정 등 ‣‘19. 5. ~ 9. : 토지, 건물 보상(재결신청) 등 ‣‘19.10. : 시유재산 취득 보고 ‣‘19. 9. ~ 11. : 실시설계 및 사업시행

6		행 정 사 항

❍ 생육 모니터링 대상 보호수 제출 : 2019.2.20.한

❍ 유지관리 사업 착공/준공보고(내역서 첨부) : 5일 이내

❍ 보호수 주변 각종 행위에 대한 사전 협의 철저

❍ 「서울특별시 보호수지정 및 관리에 관한 조례」에 의거 보호수 보호 및 점검, 관리대장 등 기록관리 철저

붙임  1. 2019년 지정보호수 유지관리 대상지 및 사업비 교부액(안) 1부

2. 정자마당 조성대상지 위치도 및 현황사진 1부

3. 스마트센서 보호수 생육 모니터링 사업 설명서 1부

4. 착공/준공보고 서식 1부.  끝.