문서번호	시설과-861
결재일자	2019.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장
박병호	02/11 오임석
협 조
	주무관		배진수
	주무관		강대호
	주무관		정성윤

서울대공원 시설물 옥상방수 및 시설개선공사 준공기한 연기

2019.  2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

서울대공원 시설물 옥상방수 및 시설개선공사 준공기한 연기

동물원 관리사무소 포함 5개소에 예정된 옥상 방수 공사(습식공사 포함) 등은 동절기 공사시 공사품질 확보가 곤란하여 공사를 일시 중지하였으며 공사중지로 진행하지 못한 기간만큼 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 시설물 옥상방수 및 시설개선공사 계획(안)(시설과-7016호, 2018.11.14.)

□ 「서울대공원시설물 옥상방수 및 시설개선 공사」동절기 공사중지 통보(시설과-7919호, 2018.12.14.)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울대공원 시설물 옥상방수 및 시설개선 공사

□ 계약개요

구 분	분 야	시공자	계약금액	계약기간	비고
서울대공원시설물 옥상방수 및 시설개선 공사	건축	동우메인티넌스 대표자 한조병	259,013,600	‘18.12.17 ∼ ‘19.04.15
	전기	㈜동오전력 대표자 김미영	15,246,000	‘18.12.11 ∼ ‘19.04.09
	통신	㈜메가이엔씨 대표자 최지영	13,500,000	‘18.12.11 ∼ ‘19.06.30

□ 주요 공사내용

❚ 동물원 관리사무소

○ 중정쪽 노후 지붕 아스팔트 슁글 철거 및 교체

○ 지붕 처마부분 동판 몰딩 교체

○ 내부 복도 노후 천정텍스 교체

○ 통신실 천정텍스 교체

○ 텍스 주변 몰딩 교체

○ 폐기물 처리

○ 옥상 사다리 설치

○ 복도천정 조명시설 철거 및 설치 등

❚ 오수처리장 관리실

○ 옥상 기존 우레탄 및 보호층 몰탈 철거

○ 우레탄 방수공사

○ 하부 전기실 내부 천정 및 벽체 페인트 공사

○ 스테인레스 선 홈통 교체

○ 폐기물 처리 등

❚ 장미원 화장실

○ 옥상 아스팔트 슁글 철거 및 교체

○ 지붕 처마부분 동판 몰딩 교체

○ 옥상 천창 누수부위 보수

○ 화장실 내부 노후 천정텍스 철거 및 교체

○ 벽체 등 수성페인트 도장

○ 폐기물 처리

○ 화장실 내부 전등 교체공사 등

❚ 열대조류관

○ 기존 방수층 철거 공사

○ 우레탄 방수

○ 폐기물 처리

○ 벽체 페인트 공사 등

❚ 대동물관

○ 옥상 방사장쪽 기존 방수층 철거

○ 우레탄 공사

○ 방사장쪽 벽체부분 옥상 빗물받이 설치

○ 기존 수목 제거

○ 누수 천창보수

○ 폐기물 처리 등

Ⅲ		그 간의 추진경과

□ 2018.11.14. : 시설물 옥상방수 및 시설개선공사 계획(안)

□ 2018.11.15. : 계약 의뢰(긴급공고)

□ 2018.12.10. : 계약체결 통보

□ 2018.12.14. : 동절기 공사중지 통보(~ ‘19.2.28.일까지)

□ 2018.12.17. : 착공계 제출

Ⅳ		준공기한 연기

□ 변경내역

구 분	변경사항		비 고
	변경전	변경후
건축공사	2018.12.17. ~ 2019.04.15.	2018.12.17. ~ 2019.06.28.	74일 연장
전기공사	2018.12.11. ~ 2019.04.09.	2018.12.11. ~ 2019.06.22.	74일 연장
통신공사	2018.12.11. ~ 2019.06.30.	2018.12.11. ~ 2019.06.30.	동절기공사 대비 공사기간 기 확보 준공기한연기 불필요

□ 준공기한 연기사유(연장기간 : 74일)

○ 동절기 습식공사가 포함된 외부 방수공사 진행 시 품질 확보가 곤란하여 공사를 중지하였으며 공사 중지기간(74일)만큼 준공기한을 연장하고자함

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 3월 1일부터 공사 시행 조치 및 준공기한 연장 통보

붙임 : 「서울대공원 시설물 옥상방수 및 시설개선 공사」동절기 공사중지공문 1부.  끝.