문서번호	주거재생과-1562
결재일자	2019.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생계획팀장	주거재생과장
문동일		서정권	02/11 홍선기
협조
	주무관		서교직

2019 가리봉 도시재생사업 추진계획

2019. 2.

도시재생실

(주거재생과)

2019 가리봉 도시재생사업 추진계획

가리봉 활성화계획에 따라 2019년도 도시재생사업 추진계획을 수립, 추진코자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 사업개요

○ 위    치 : 구로구 가리봉동 일원, 332,929㎡

○ 사업기간 : 2016 ~ 2020

○ 총사업비 : 138.9억원 (마중물사업 100[국50%, 시50%], 별도지방비 38.9)

【 활성화계획 예산집행계획 】

사업 유형	사업구분	사업비(백만원)			단계별 재원투입(백만원)					비고
		계	국비	지방비	2016	2017	2018	2019	2020
마중물 사업	주민공동체 활동 및 역량강화	900	450	450	165	52	221	221	241	계속추진
	불량도로 정비 등 마을공간 개선	1,011	505.5	505.5	-	-	-	1,011	-	금년추진
	범죄 없는 마을 조성	666	333	333	666	-	-	-	-	완료
	깨끗한 마을만들기	140	70	70	140	-	-	-	-	진행중
	방재대응시스템 조성	140	70	70	140	-	-	-	-	일부완료
	마을마당・주차장 복합시설 조성	1,872	936	936	-	-	1,030	842	-	금년추진
	우마길 문화의거리 활성화	1,206	603	603	659	547	-	-	-	완료
	앵커시설 조성	2,918	1,459	1,459	2,918	-	-	-	-	금년추진
	가리봉루트 조성	1,147	573.5	573.5	50	-	1,097	-	-	일부완료
	① 마중물사업 소계	10,000	5,000	5,000	4,738	599	2,348	2,074	241
지자체 사업 (별도 지방비)	현장지원센터 인건비 및 운영비 등 (활성화계획 용역비 포함)	1,030	-	1,030	209	178	215	214	214	진행중
	앵커시설 운영	272	-	272	-	-	120	75	77	진행중
	가리봉 중심도로 정비	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	금년추진
	소통공간 조성 운영	1,588	-	1,588	-	-	1,568	10	10	-
	② 별도지방비 소계	3,890	-	3,890	209	178	2,903	299	301
합 계 (①+②)		13,890	5,000	8,890	4,947	777	5,251	2,373	542

○ `19 예산액 : 4,068백만원(국 2,154, 시 1,914)  ※ ‘18 이월예산 포함

구 분	예산현액	2019년 본 예산				2018 이월예산 (시 설 비)
		사무관리비	공공운영비	자치단체 경상보조	시 설 비
계	4,068	202	12	296	2,471	1,087
국 비	2,154	-	-	-	1,067	1,087
시 비	1,914	202	12	296	1,404	-

□ 2018 추진실적

○ 주요사업 추진실적

- 주민공동체활동 및 역량강화

・ 주민공모사업 추진   : 19건 67백만원(상반기 12건, 하반기 7건)

・ 재생학교 6~7기 운영 : 수강인원 76명(6기 20명, 7기 56명)

・ 홍보 및 보도

▹ 소식지 발간・배포(2회) : 플러스 가리봉 9-10회

▹ 언론보도 : 주민의, 주민에 의한, 주민을 위한 가리봉동 도시재생(아시아경제, ‘18.6.5)

- 불량도로 정비 등 마을공간 개선공사 : 실시설계용역 완료(‘18.10.~’19.2)

- 범죄없는 마을 조성 : CCTV 설치(2개소)

- 방재대응시스템 조성사업 : 비상소화시설 5개소 설치

- 앵커시설(벌집) 조성사업 추진

・ 앵커시설 리모델링 공사 A동(행복마루) : 공사착공 및 준공(’18.1.9~9.28)

・ 앵커시설 리모델링 공사 B동(윙윙센터) : 공사착공(’18.6.27), ‘19.2월 준공예정

- 가로환경 개선사업 추진(우마길 문화의거리 활성화, 가리봉루트 조성, 상징조형물 설치)

・ 사업내용 : 우마길 도로정비(폭 8m, 연장 310m), 주차금지선 구획

・ 우마길 간판정비(34개 건물, 127개 업소, 139개 간판), 상징조형물 설치(1개소)

・ 가리봉 주요거점 연결하는 도로·보도 정비(폭 3~6m, 연장 1,200m)

조명 및 안내표지판 설치

○ 사업별 예산 집행실적                                                      (단위 : 백만원)

단위사업	총 집행액 (‘15~‘18년)	2018 집행현황
		예산현액	집 행 액	이 월 액	내 용
계	5,934	3,905	2,817.3	1,087.7
① 주민공동체활동 및 역량강화	568	351	351	-	재생학교, 공모 등
② 불량도로 정비 등 마을공간 개선	31	31	31	-	설계
③ 범죄없는 마을조성	600	25	25	-	CCTV 2개설치
④ 깨끗한 마을만들기	0	0	0	-	-
⑤ 방재대응 시스템 조성사업	35	35.4	35.4	-	비상소화시설 5개
⑥ 마을마당주차장 복합시설 조성	0	754	0	754	보상(명시이월)
⑦ 우마길 문화의 거리 활성화	980	850.3	850.3	-	공사
⑧ 앵커시설 조성	3,221	1,359	1,025.3	333.7	공사(사고이월)
⑨ 가리봉루트 조성	499	499.3	499.3	-	공사

※ ‘18년 예산현액(3,905백만원) : ’17년 이월예산(시설비 2,009), ‘18년 본예산(시설비 1,285, 자치단체경상보조 611)

Ⅱ		2019 추진계획

□ 추진방향

○ 가리봉 도시재생 활성화계획에 따라 마중물사업 및 별도 지방비(시비) 사업 추진

○ ‘19년 예산사업인 불량도로 정비 등 마을공간 개선사업과 마을마당・주차장 복합시설 조성사업, ‘18년 이월사업 추진 철저

○ 주민공동체 활성화 및 역량강화 위한 재생학교, 공모사업 추진 등

□ 2019 예산 집행계획 ※ 사업별 예산 집행계획에 따라 국,시비 집행

구분	단위사업	사업내용	2019 집행계획 (단위 : 백만원)			예산과목 (국/시비)
			합 계	‘19 본 예산	‘18 이월액
합 계			3,854	2,767	1,087
마중물 사업	① 주민공동체 활동 및 역량강화	재생학교, 주민공동체사업, 공모사업, 홍보	296	296	-	자치단체경상보조(시비)
소 계			3,558	2,471	1,087	시설비(국2,154, 시1,404)
마중물 사업	② 불량도로 정비 등 마을공간 개선	불량도로(380m)․ 보도정비(4개노선) 등	980	980		시설비(국비)
	③ 마을마당・주차장 복합시설 조성	사업부지 매입(보상) 복합공간 조성・운영	1,245	491	754(명시)	시설비(국841, 시404)
	④ 앵커시설 조성 (B동)	앵커B동 리모델링 공사추진	333		333(사고)	시설비(국비)
별도 지방비	⑤ 가리봉 중심도로 정비	현 중심도로 폭 2~3m 확폭, 연장 117m 증설	1,000	1,000		시설비(시비)

□ 세부 추진계획

① 주민공동체 활동 및 역량강화(자치단체 경상보조)

- ‘19 예산 : 296백만원

- 추진내용 : 재생학교, 주민공동체사업, 주민공모사업, 재생사업 홍보 등

- 추진일정 : '19.3.~12. (자치구 보조금 사업으로 별도계획 수립 시행)

*************************************

② 불량도로 정비 등 마을공간 개선

- 위 치 : 가리봉동 일대 - ‘19 예산 : 980백만원 - 사업내용 : 불량도로(3개 노선 380m)·보도정비(4개 노선 1.2km), 미끄럼방지 포장 및 경사지 안전시설 설치 등 - 추진일정 ‣ '18.10~'19.2 : 실시설계 완료 ‣ '19. 3 ~ 7. : 공사발주, 준공

③ 마을마당․주차장 복합시설 조성

- 위 치 : 가리봉동 87-97 - ‘19 예산 : 1,245백만원 - 사업내용 : 주차장․마을마당 복합시설 조성 ******************** - 추진일정 ‣ ******************* ************** ‣ '19.5~12 : 사업부지 매입, 설계 ‣ '20.1~12 : 공사발주, 준공

④ 앵커시설 조성(B동)

- 위    치 : 가리봉동 105-10

- ‘19 예산 : 333백만원(’18사고이월)

- 사업내용 : 기존 벌집건축물 리모델링 공사

- 추진일정

‣ '19.1~ 4  : 공사시행 및 준공

‣ '19.5~12  : 앵커 운영

⑤ 가리봉 중심도로 정비

- 위 치 : 가리봉오거리~ 우마길~남구로역 - ‘19 예산 : 1,000백만원 - 사업내용 : 가족통합지원센터와 연계한 일부구간 확폭 개설 ‣ 현 도로폭 2~3m 확폭, 연장 117m 증설 (도로폭 6m, 연장 260m → 도로폭 8~9m, 연장 377m로 확폭) - 추진일정 ‣ '19.1.~2. : 계획수립 ‣ '19.3.~7. : 설계착수, 완료 ‣ '19.7.~12. : 공사착공, 완료

□ 행정사항

○ 2019 가리봉 도시재생사업 세부 추진계획 수립, 추진

- ‘19.2월 : 세부 추진계획 등 사업계획 수립, 제출(구로구 도시재생과)

예산 재배정(시 주거재생과)

○ 2019 사업별 예산 집행계획에 따라 국, 시비(예산구분) 집행 철저

※ 금년 예산 집행계획 이 외의 사업비 집행 시 사전계획 수립, 보고 철저

○ 사업부서는 사업완료 후 준공(정산) 보고 철저(붙임. 보고양식 참조)

붙임 : 준공보고(양식) 1부.  끝.