문서번호	공원녹지정책과-2397
결재일자	2019.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
이지영		김상주	02/11 유영봉
협조

서울역 지하보도 캐노피 시범녹화관련

구조안전진단 용역 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	중구 도로관리과	서울역 지하보도 캐노피 녹화	사업추진을 위한 구조안전진단 실시	7,260천원

2019. 2.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

서울역 지하보도 캐노피 시범녹화관련

구조안전진단 용역 추진계획

서울로 7017에서 바라보는 외부경관 중 주변 경관을 저해하는 서울역 캐노피를 구조안전진단 결과에 따라 시범으로 녹화하여 서울로의 자연환경을 외부로 확장 연결하고자 함

1		추 진 방 향

□ 서울로 7017 주변 경관향상(경관연출)을 위한 녹화추진

□ 캐노피 시설물의 녹화추진에 따른 구조적 안전성 확보 방안을 위하여 구조안전진단 실시

□ 구조물 하중 결과에 따라 저관리형·초경량으로 캐노피 녹화

2		대상지 현황

□ 서울역 지하보도 캐노피

○ 위    치 : 서울특별시 중구 봉래동 2가 63-7번지

○ 관리부서 : 중구청 도로시설과

○ 대상면적 : 220㎡

서울역우체국 앞 지하보도	지하보도 출입구 상부 정면

○ 협의내용

- ‘18.11.12. : 중구 도로시설과에서 ’18.4. 市 도로시설과에 공사비(10억) 요청하였으나, 별도 예산편성이 없었음

- ‘18.12.15. : 구조물 상부 녹화시설 하중 증가에 따른 시설물의 구조적 안전성 확보 방안 등에 대하여 중구 도로시설과와 협의후 공사 시행

※ 해당 지하보도는 1967.6.17. 사용개시 후 50년 경과된 시설물(B급)

3		추 진 계 획

○ 건    명 : 서울역 지하보도 캐노피 구조안전진단 및 옥상녹화 유형제안 용역

○ *********************

○ ************************

○ 추진기간 : 착수일로부터 45일

○ **************

○ 추진내용 : 구조안전진단, 옥상녹화 유형제시, 구조도면 작성

※ 캐노피 녹화조성(안)

옥상(지붕)녹화(경량형)	옥상(지붕)녹화(경량형)

- 구조안전진단용역 결과에 따라 허용하중에 따른 세부유형 추후 선정

4		소 요 예 산

○ 캐노피 구조 안전진단, 옥상녹화 유형제안 및 구조 도면 작성  ********** (예산과목 : ******** 운영관리, 시설비)

5		향 후 계 획

○ ‘19. 2.~3. : 캐노피 구조안전진단 및 구조도면 용역시행 및 작업시행 세부내용에 대한 협의(서울시→중구 도로관리과)

○ ‘19. 4.~5. : 기반조성 및 경관 녹화 시행

○ ‘19. 5.~6. : 조성완료 및 관리

붙임 : 과업내용서 및 설계내역서 각1부.  끝.