문서번호	서울특별시차량정비센터-1613
결재일자	2019.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
이임규		유진국	02/12 신용휴
협조
	정비팀장		代국중영

구내 변전실 노후 전기설비 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2

서울특별시차량정비센터

구내 노후 전기설비 교체 계획

우리센터 변전실의 수배전반 노후(1995년 설치)로 안정적인 전원 공급이 의심스러운 상태이며, 갑작스러운 정전으로 인한 업무차질과 주변 사업소(SR센터, 자동차 검사소 등)의 피해가 예상되어 노후된 전기설비를 교체하여 센터 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				노후 전기설비 교체 계획

변전실 수배전반 설치 현황

구 분	고압변압기반 300Kva(상용)	고압변압기반 300Kva(예비)	고압변압기반 150Kva	고압 배전반 300Kva	저압 배전반	저압 배전반
수 량	1면	1면	1면	4면	3면	3면
설치년도	2011	2012	2012	2011×1면 2018×3면	2012×2면 2017×1면	1995

❍ 교체대상 : 저압배전반 3면 (300Kva×1면, 150Kva×2면), 1995년 설치

❍ 구내 변전실 수배전반 13면 중 10면은 2011년 이후 교체하여 상태가          양호하나 나머지 저압배전반 3면은 20년 이상 사용되어(조달청 내용          연수 10년) 노후로 인한 전기설비 안전성이 의심스러운 상태이므로

안전성이 담보되지 않은 저압배전반을 교체하여 안전사고 예방에

만전을 기하고자 함

❍ 관련(현황) 사진

교체대상 저압배전반

교체내용

❍ 저압배전반 설비 3면

- LV-S2 PNL (NFB)

- LV-M2 PNL (NFB)

- LV-S3 PNL (NFB)

❍ 기존 전기․기계설비들과의 연결 상태를 고려하고 현 상태 기능을 최대한         유지하는 선에서 저압배전반 설비 제작 교체

❍ 소요예산 : 약70,000천원

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약)

❍ 납품기간 : 납품요구일로부터 60일 이내

노후 전기설비 교체에 따른 감리용역 시행

❍ 관련근거

- 전력기술관리법 제12조(공사감리)에 의거 감리용역 시행

❍ 사업개요

- 위    치 : 서울시 성동구 가람길 117

- 규    모 : 구내 변전실 수배전반 개선

- 과업범위 : 구내 변전실 수배전반 개선공사 감리용역

- 감리기간 : 착수일로부터 40일간

- 소요예산 : 15,000천원

❍ 예산과목 : 차량정비센터, 효율적인차량정비, 차량정비센터 시설유지                     보수, 시설비(401-01), 감리비(401-02)