문서번호	설비부-1863
결재일자	2019.2.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박갑임		임병국	02/12 代여인웅
협조

‘서울바이오허브조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재 납품기한 연장 검토보고

2019. 02.

	도시기반시설본부 (설 비 부)

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재 납품기한 연장 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 책임건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재 납품기한 연장에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

❍ 공사규모 : 신관동(대수선)-지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

별관동(증 축)-지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,  〃

❍ 공사기간 : ‘17. 09. 29.~ ‘19. 08.14.(‘18.03.26.~‘19.08.14.)

❍ 공사금액 : 1,180백만원(2차:1,011백만원)

❍ 시 공 사 : ㈜우현이앤지

❍ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

❍ 지열시스템 납품기한 연장 요청: ㈜한종홍릉 제2019-1234(‘19.2.12.)

3		계약현황

품 명	계 약 자	계약금액(원)	납품기한	비 고
지열시스템	*****	***********	***********

4		검토보고 내용

❍ 납품기한 연장사유

- 선행 공종(건축 등) 준공기한이 연장됨에 따라 납품 일정 조정이 필요

❍ 납품기한 연장내용

품 명	계 약 자	계약금액	납품기한		납품요구번호 (계약번호)
			변경 전	변경 후
지열시스템	*****	************	**********	***********	***********

※ 계약금액 변경없음

❍ 납품기한 연장 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 책임건설사업관리기술단 검토의견

- 건축공사 및 기계설비공사 준공기한이 연장됨에 따라 현장 공정등을 검토한 결과 납품기한을 연장하여 시행함이 적절하다고 판단됨

5		보고자 의견

❍ 책임건설사업관리기술단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로,  현장 여건에  맞게 관급자재 납품기한을 연장하여 공정관리에 만전을  기하고함.

따로 붙임 : 관급자재 납품기한 연장 관련 문서 1부.