문서번호	시설보수과-615
결재일자	2019.2.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
이평주		임영철	02/13 송만규
협조
	주무관		김종범

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

‘19년 도로시설물 안전점검 추진계획

2019. 2.

동부도로사업소

(시설보수과)

‘19년 도로시설물 안전점검 추진계획

‘19년 도로시설물 안전점검 추진계획을 수립하여 시설물 안전점검

및 유지관리에 만전을 기하고자 함

1	현 황

▢ 시설물 현황 : 삼성교외 41개소

(단위:개소)

구분	계	일반교량	고가차도	지하차도	복 개 구조물	터널
계	42	24	1	13	1	3
1종	4	-	-	장지	-	매봉,일원, 위례(3개)
2종	17	삼성교,탄천2교,탄천교,광평교,대곡교,대치교,성내교, 영동2.3.5교,강일육교(11개)	-	대치,석촌,천호, 청계산,신원(5개)	-	-
3종	2			송파,가락(2개)
법정외	19	장지1.2교,복정2교,세곡1.3교,헌릉교,오륜교,성내5교,서부교,잠실호수교,상일2교,고덕교, 여의천교(13개)	방이고가	위례1,위례지하보차도,내곡, 신원박스, 탄천우안(5개)	성내 유수지교	-

※ 미인수 시설 : 장지, 위례1, 탄천우안지하차도

▢ 점검인력 : 시설보수과장외 6명

▢ 점검기준

□ 관련근거

• 시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조

• 재난 및 안전관리기본법 제27조

• 서울특별시 도로등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조

□ 세부기준

구분	정기점검	정밀점검	정밀안전진단
대상	1 ․ 2 ․ 3종, 법정외 시설물	1․2종, 법정외 시설물	1종 시설물 (완공후 10년이 지난 시설물)
실시 시기	A․B등급 반기에 1회 이상	A등급 3년에 1회이상	A등급 6년에 1회이상
		B․C등급 2년에 1회이상	B․C등급 5년에 1회이상
	D․E등급 1년에 3회 이상	D․E등급 1년에 1회이상	D․E등급 4년에 1회이상
수준	전반적인 외관형태 관찰	- 면밀한 외관조사, 측정 및 시험실시 - 시설물 상태평가	- 정밀한 외관조사, 측정 및 시험 실시 - 시설물 상태 및 안전성 평가
시행 방법	자체점검	- 안전진단 전문기관 - 시설물 유지관리업자	안전진단 전문기관

2	추진방향

▢ 24절기 점검 및 순찰시행으로 안전점검 공백 방지

▢ 외부전문가 자문단 구성 ․ 운영으로 책임관리 강화

▢ 시민과 함께하는 점검으로 신뢰받는 시정구현

▢ 정밀점검 및 진단용역을 통해 시설물 안전관리 강화

3	세부 추진계획

▢ 24절기 점검 ․ 순찰체계 유지

□ 정기점검 공백기간에 특별점검 및 순찰을 통해 점검공백 방지

점검 구분	상 반 기												하 반 기
	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
절기	입춘	우수	경칩	춘분	청명	곡우	입하	소만	망종	하지	소서	대서	입추	처서	백로	추분	한로	상강	입동	소설	대설	동지	소한	대한
정기							상반기																하반기
특별		설날		해빙기						우기대비						추석					동절기
순찰	●		●			●			●			●	●	●	●		●	●	●	●

▢ 외부전문가 자문단 구성 ․ 운영

□ 자문단 구성 : 55명(전문업체 29, 공직경력 19, 관내시설 점검경력자 7)

• 서울시 시설안전자문단중 사업소 관할 거주위원으로 인력풀 구성(별첨)

□ 자문단 운영

• 운영기간 : 연중

• 운영방법

╺ 정기점검 특이사항 발생시설, 특별점검(해빙기,우기.겨울철)시 참여

╺ 점검대상별 관련분야 전문가 선정

▢ 시민과 함께하는 안전점검 시행

□ 대상시설 : 매봉터널 등 2개시설(예정)

□ 점검시기 : 4월, 10월중

□ 점 검 자 : 주민대표 10명 내외(지역 시의원 포함)

□ 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰

• 시설물 안전점검에 대한 시민 체험기회 제공

▢ 정밀점검 및 정밀안전진단 용역시행

□ 용역시기 : 2019. 4. ~ 11. 30.

□ 점 검 자 : 안전진단전문기관, 유지관리전문업체, 외부전문가

□ 점검수준

• 면밀한 외관조사와 측정 및 시험실시

• 결함부위 외관조사망도 작성

• 내진설계여부 확인

• 시설물 안전성평가(일원터널)

□ 점검대상 : 일원터널 등 18개소(별첨)

▢ 자체 안전점검 시행

□ 정기점검

• 점검대상 : 삼성교외 41개소

• 점검시기 : 년2회 실시(상.하반기)

• 점 검 자 : 시설물 담당 6명(2인1조 편성)

• 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰

• 점검방법

╺ 상위점검(정밀점검)을 실시할 경우 상위점검으로 대체(1회)

╺ 특별점검(계절별 취약점검)과 중복되지 않토록 점검시행

╺ 상위점검(정밀점검)시 지적된 손상을 중심으로 점검실시

╺ 점검중 구조적 손상부 발견시 전문가 합동점검 시행

□ 일상점검

• 점검대상 : 삼성교외 41개소

• 점검시기 : 주 2회이상 순찰실시(시설물별 1회/주)

• 점 검 자 : 시설물 담당 6명

• 점검수준 : 육안으로 전반적인 시설물 형태 순찰 ․ 점검

• 점검방법

╺ 포장,배수,교통안전시설등 시민불편사항 위주 순찰

╺ 특별점검 공백기간은 전차점검(정기 및 특별) 지적사항 모니터링  순찰시행

□ 특별점검(취약시기 및 기타)

• 점검대상 : 삼성교외 41개소

• 점검종류 : 설날, 해빙기, 우기, 추석, 동절기대비 안전점검,

시민과 함께하는 안전점검, 국가안전대진단 등

※ 국가안전대진단 시기와 동일(해빙기 등)시 계획에 포함 시행

• 점검수준 : 전반적인 외관형태 관찰

• 점검시기 및 점검자

구분	점검시기	점검자		비고
		자체	자문위원
설날대비	1월	◉
해빙기 대비	2~3월	◉	◎	외부전무가 합동
우기 대비	5~6월	◉	◎	외부전문가 합동
추석 대비	8월	◉
동절기 대비	11월	◉	◎	외부전문가 합동
시민과 함께하는 안전점검	4월	◉		시의원 시민대표등

3	행정사항

▢ 점검계획 수립 및 조치

□ 안전점검 시기 도래시 세부점검 계획수립

□ 경미한 사항은 기동반 활용 즉시 조치

□ 보수예산이 수반되는 사항은 보고서 작성후 연간단가 작업지시

□ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련

분야 전문가의 의견을 포함한 조치계획 수립

□ 안전점검 결과 미 조치사항에 대하여는 조치완료시 까지 추적관리

▢ 점검수당 지급

□ 외부전문가에 의한 안전점검은 결과 보고서에 의거 점검수당 지급

╺ 예산과목 : 도로시설물 운영(도시개발특별회계), 도로시설물 안전자문단운영, 일반운영비, 사무관리비

╺ 소요예산 : 38,100천원

□ 점검수당 기준

구분		점검수당	비 고
현장점검	전문가	20만원 / 인 ․ 회	- ′18년도 엔지니어링 기술자 노임단가 기준에 따라 지급
	의원,시민	10만원 / 인 ․ 회	- ′18년도 서울시 예산편성 잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당 지급 ∙ 기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시)
자문	전문가	10만원 / 인 ․ 회 (2시간 이상시)	- ′18년도 서울시 예산편성 잠정기준의 위원회 참석수당 지급기준에 준해서 점검수당 지급 ∙ 기본 10만원, 초과 5만원(2시간 이상시)

따로붙임  1. 시설물별 현황 1부

2. 관내 근무지 시설안전자문위원 명단(인력풀) 1부

3. 정밀점검 및 정밀안전진단용역 현황 1부   끝.