문서번호	토목부-2348
결재일자	2019.2.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		장종환	02/13 김영수
협조	주무관		황윤기
	주무관		권해엽

자전거 경사로 설치 실정보고

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사)

2019. 02.

토 목 부

자전거 경사로 설치 실정보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 -

보행교량 이용시 자전거 경사로가 없어 불편하다는 학여울 청구아파트  민원이 접수되어 경사로를 설치하여 민원을 해소코자 보고 드림

※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제18-271호(2018.12.17.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 251m)

○ 도 급 비 : 119억원(3차 42억원)

○ 공사기간 : ′16.04. ~ ′19.04.

○ 시 공 사 : ㈜한양산업개발

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트

Ⅱ		감리단 검토내용

○ 중랑천 초안산 보행교량 이용시 자전거 경사로가 없어 불편하다는 민원이

노원구에 접수되어 민원을 해결 및 인수인계를 위하여 설치가 필요한 실정임

○ 자전거 경사로 설치 계단 현황

○ 추진경위

- ‘18.05.01. : 중랑천 초안산앞 보행교량 일부 개통

- ‘18.05.25. : 민원사항 이첩(노원구→토목부)-자전거 도로 확보 요청

- ‘18.06.08. : 시설물 관리이임을 위한 합동점검 조치사항 알림(경사로 설치 등)

○ 자전거 경사로 설치계획

- 계단1~4 양측에 자전거 경사로 설치

※ 최초 민원접수시 엘리베이터 구간을 제외하고 한쪽으로만 설치하였으나,

엘리베이터가 좁고, 자전거 이용자가 많아 전계단 양방향 설치 요구

자전거 경사로	자전거 경사로

○ 단가적용

구분	공 종	단위	적 용	적정여부	비고 (산출근거)
부대공	자전거 경사로	m	신규단가 (유통물가 ‘18년 09월 기준)	적정 (유통물가 단독등재 설치비 포함)	협의율 적용 (93.83%)
			250,000	234,575 (협의율 적용단가)	품명 NBP-09A-200

※ 현재 조달청 미등록에 따른 관급자재 미적용

○ 공사비 증-감 현황                                          (단위:천원)

구 분	규 격	단위	당 초		변 경		(증.감)	비 고
			수 량	금 액	수 량	금 액
자전거경사로		m		-	166	38,939	38,939
제 경 비				-		10,594	10,594
공 사 비				-		49,533	49,533

Ⅲ		조치계획

○ 중랑천을 이용하는 자전거 이용자 및 보행교량을 이용하는 주민들의 해소를 위하여 자전거 경사로를 설치하는 감리단의 검토의견이 적정하여 승인조치하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함

붙  임 : 감리단 검토 의견서 및 민원내용 각 1부.  끝.