문서번호	기전과-1312
결재일자	2019.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김은수		최태용	02/14 신응수
협조	주무관		배용우
	주무관		임소라

월계3 지하차도 배수펌프 제조구매 계획

2019. 2

북부도로사업소

(기전과)

월계3 지하차도 배수펌프 제조구매 계획

노후 된 월계3 지하차도 배수펌프를 적기에 교체하여 우기철 지하차도 수해 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 관련근거

○「2019년 기전과 주요업무 추진계획보고」(기전과 - 117, ‘19.1.4)

2		시 설 현 황

□ 관련근거

○ 지하차도 배수펌프 설치현황 : 7개소 21대

구분	창동	녹천	하계	월계1	월계2	월계3	방학	비고
계	3대	3대	3대	4대	3대	2대	3대	정릉, 솔샘
설치년도	14년:1대 16년:2대	14년:3대	14년:2대 15년:2대	08년:2대 14년:1대 15년:1대	16년:1대 17년:2대	07년:2대	08년:1대 15년:2대	자연배수

○ 월계3 지하차도 설치위치 : 노원구 월계4동 228-3

○ 월계3 지하차도 준공년도 : 1995.11.

○ 교체대상 배수펌프 제원

지하차도명	배수펌프						비 고
	수량(대)	설치년도	용량	토출관 구경	토출량 (㎡/min)	수전 방식
월계3	2	2007×2	50hp (37kw)	350	15㎥/분⋅대	3Ø4W 380V	2대 교체

○ 월계3 지하차도 배수펌프 실 전경

전 경	펌프실	배전반

3		교 체 사 유

○ 배수펌프 노후화로 인한 배수효율 저하

※ 조달청 고시 내용연수 : 11년

○ 장기사용에 따른 전기 절연내력 저하

○ 펌프실 배관 및 부속 자재 부식으로 인한 교체 필요

4		개 선 방 안

□ 개선내용

○ 교체대상 : 월계3지하차도 배수펌프 2대 교체

▶  펌프실 배관내 부식 된 배관,  및 체크밸브, 후렉시블죠인트 등 교체

▶  기존 설치 된 배수펌프 용량과 동일하게 설치(50HP×2대)

※ 연차별 배수펌프 교체 추진계획

계	계	2018년	2019년	2020년
대상	3개소	-	월계3지하차도	방학지하차도	월계1지하차도
수량	4대	-	07년 50HP×2대 설치	08년 30HP×1대 설치	08년 50HP×2대 설치

□ 추진내용

○ 사 업 명 : 월계3지하차도 배수펌프 제조구매

○ 사업기간 : 계약일로부터 50일

○ 소요예산 : 100백만원

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 지하차도 노후 배수시설개량사업,                      시설비 및 부대비, 시설비.

○ 계약방법 : 조달구매(조달우수제품 우선구매)

- 조달청 우수 공동브랜드 선정하여 조달청에 제작 구매 설치 의뢰

□ 추진일정

○ 2019. 2. 구매발주 및 계약

○ 2019. 4. 납품 및 설치완료

○ 2019. 5. 시운전 완료

□ 사업효과

○ 배수펌프 적기 교체에 의한 수해예방

○ 우기철 지하차도 기전시설물 효과적 운영에 따른 수해예방

4		행 정 사 항

○ 일상감사 의뢰

- 2019. 2월 중 의뢰

○ 예산재배정 요청(도로시설과)

- 2019. 2월 중 요청

붙임 1. 설계내역서/구매지침서 1부.  끝.