문서번호	기전과-1482
결재일자	2019.2.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
천흥규		서수일	02/15 이학구
협 조

서빙고지하차도 비상발전기 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

서부도로사업소

(기전과)

서빙고지하차도 비상발전기 교체계획

정전 등 비상상황 발생시 조명 및 배수펌프 등에 지속적인 전력공급을 위한 장기사용으로 노후된 지하차도 비상발전기를 교체하여 이용 시민의 안전확보 및 기전시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 사업근거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토해양부, 2016.8.12.)

○ 물품 내용연수(조달청고시 제2018-14호, 2018.9.27.)

□ 지하차도 비상발전기 현황

시설명	한전계약	용량	설치년월	제작사	비고
증산	고압 350㎾	115㎾	2008. 06	라온테크
퇴계로	동력 23㎾ 조명 20㎾	90㎾	2018. 06	라온테크
서빙고	동력 26㎾ 조명 34㎾	75㎾	2006. 03	두산/이스트파워	교체 대상
모래내	동력 47㎾ 조명 26㎾	48㎾	2002. 11	지엔씨에너지
두무개	조명 71㎾	48㎾	2003. 04	현대중전기
성산	동력 15㎾ 조명 38㎾	40㎾	2003. 06	코스탈파워

□ 교체사유

○ 비상발전기 내구연한 경과로 노후화되어 고장 및 성능 저하

○ 구매설치가 오래된 제품으로 유지관리비용 증가 및 신속한 부속품 수급이       곤란하여 발전기 고장시 비상상황에 긴급대처가 어려움

□ 사업개요

○ 사업명 : 서빙고지하차도 비상발전기 제작구매 설치

○ 예산현황 : 35,000천원

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 노후 전력설비                   개량사업, 시설비, 시설비

○사업내용 : 비상발전기 1대 교체

교체대상	한전계약	용량	교체사유	비 고
서빙고지하차도	동력 26㎾ 조명 34㎾	75kw	내용연수경과로 성능저하

※ 제품선정 : 기존 설치된 발전기의 규격 및 용량을 동등 제품으로 구매

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 2019. 5.

○ 현장 위치 및 사진

□ 행정사항

○ 기존발전기는 불용물품 관리전환 소요조회후 관리전환 요청이 없을경우       현장철거 조건으로 감정평가의뢰 후 매각 진행

○ 구매발전기 설치 일정은 기존발전기 매각 일정과 조율하여 진행하며 사업       기간내 매각이 안될 경우 기존발전기를 철거하여 사업소 보관후 매각 처리

□ 추진계획

○ 2019.02 : 비상발전기 교체계획서 첨부 예산 재배정 요청

○ 2019.02 : 불용물품 관리전환 소요조회

○ 2019.02 : 기존발전기 감정평가 및 매각진행

○ 2019.03 : 조달구매(3자단가계약)

○ 2019.03 : 계약 및 착공

○ 2019.05 : 사용전검사·시험운전 및 준공.  끝.