문서번호	건축부-2254
결재일자	2019.2.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
장진우		代김찬유	02/15 임인구
협조

『서울 시네마테크 건립공사

설계용역 기간연장 검토보고

2019. 2.

『서울 시네마테크 건립 공사』

설계용역 기간연장 검토보고

「서울 시네마테크 건립공사 설계용역」관련, 설계자의 용역기간 연장 요청이 있어, 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		용역현황

□ 용 역 명 : 서울 시네마테크 건립공사 설계용역

□ 위    치 : 중구 마른내로 38(중구 초동 64-11)

□ 규    모 : 지하3층/지상10층, 연면적 4,893.6㎡

□ 용 역 자 : ㈜건축사사무소 매스스터디스(대표 박기수)

□ 용역금액 : 859,730천원

□ 용역기간 : 2018. 5. 11. ~ 2019. 4. 5.

Ⅱ		추진경위

□ 2018.03.06. : 설계공모 당선작 선정(문화융합경제과)

□ 2018.05.11. : 설계용역 계약

□ 2018.07.27. : 총괄건축가 보고(문화융합경제과, 도기본)

- 보고결과 : 영화의 상징성을 건물에 표현

□ 2018.08.20. : 용역 일정 조정 검토 요청(설계자)

□ 2018.10.1.~11.29. : 용역의 일시정지(60일)

□ 2018.12.18. : 계획설계 완료

□ 2018.02.01. : 용역기간 연장 요청(설계자 → 건축부)

Ⅲ		용역기간 연장 검토

□ 근 거

- 지방자치단체 용역계약 일반조건 제8절 2. 계약기간 연장

- ************************************************

□ 용역기간 연장요청 사유

- 외부디자인 재검토

※  총괄건축가 자문 및 서울시네마테크 건립준비위원회 자문결과 반영(외관디자인 변경 등)

□ 용역기간 연장내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	**********************	***********************	*******

□ ******************

Ⅳ		처리의견

□ ************************************

붙 임 : 설계용역 기간연장 요청서(설계자) 1부.  끝.