문서번호	급수운영과-2700
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김용만	김찬모	이병운	02/18 박영헌
협 조
	시설관리과장		김홍준
	시설관리팀장		이준호
	기전팀장		오정훈
	주무관		전성호
	주무관		권영안

『2019년도 홍은배수지외 15개소』 정밀안전진단 및 정밀점검 발주계획

2019. 2.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2019년도 홍은배수지외 15개소』

정밀안전진단 및 정밀점검 추진계획

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조 및 동법 시행령 제9조에 따라 ’19년도 홍은배수지 등 15개소 상수도시설물에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검을 실시하여 시설물의 안전성을 확보하고, 시설물 유지관리 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				현 황

□ 대상 시설물

○ 배수지 : 정밀안전진단 2개소 60,500㎥, 정밀점검 6개소 19,600㎥,

(배수지 내진성능 상세평가 : 4개소, 만리배수지 사면 안전진단 1개소)

○ 가압장 : 정밀점검 3개소 10,977㎥/일.

구분	시행방법	대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	비고
배수지	정밀안전진단 (2개소)	증산배수지	체육공원길 47(증산동 산18-6)	60,000㎥	1991년
		수색배수지	수색동 산30-4	500㎥	1976년
	정밀점검 (6개소)	홍은배수지	서대문구 홍은1동 산 1-129	12,500㎥	1972년
		연희배수지	서대문구 연희동 113-10	2,000㎥	1961년
		홍제배수지	서대문구 홍제3동 산 1-100	500㎥	1986년
		홍은3배수지	서대문구 홍은3동 산 11-63	400㎥	1984년
		자하문배수지	서대문구 홍은2동 8번지	200㎥	1987년
		응암배수지	백련산로2길39앞 (응암동 산7-255)	4,000㎥	1991년
가압장	정밀점검 (3개소)	창천가압장	서대문구 창천동 121-24	5,122㎥/일	1976년
		홍은3가압장	연희로41길 28(홍은동 204-20)	3,355㎥/일	1985년
		녹신가압장	통일로길 100-2(녹번동280-2)	2,500㎥/일	1992년
토목 (구조)	내진성능 상세평가 (4개소)	만리배수지	만리재로 27길69(아현동 87-7)	11,000㎥	1956, 85년	증산가압장포함
		능안배수지	봉원사길 96-93옆(봉원동 2-206)	6,000㎥	1995년
		할미당배수지	모래내로24나길6-23위 (홍제2동 산 33-135)	200㎥	1981년
		증산배수지	체육공원길 47(증산동 산18-6)	60,000㎥	1991년
기타	정밀안전진단 (사면)	만리배수지	중구 만리동 42번지	100m*15m	1956, 85년

※ ’18년도 만리배수지외14개소 정밀안전진단 용역준공 시에 외부자문 심의위원회의 의견이 있어 내진성능 상세평가 누락된 배수지(만리,능안,할미당) 3개소에 대해 금회 실시

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법시행령 제9조

- 실시주기

안전등급	정밀점검		정밀안전진단	비 고
	건축물	상수도(그 외 시설물)
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B․C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D․E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

○ ’19년도 사업소별 안전진단 및 점검대상 알림 : 본부시설관리과-6249호(‘18.7.25)

□ 추진목적

○ 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적･기능적 결함과        내재되어 있는 위험요인 발견, 안전성 확인하고 보수･보강 및         조치방안을 제시

○ 보수･보강 등 시설개량 추진으로 시설물의 안전을 확보하는데 있음

Ⅱ				추 진 계 획
		c

□ 추진기간 : 2019. 4. ~ 2019. 11.(210일간)

□ 추진경과(일정)

○ 2018. 8. 14. : 기술용역타당성 심사요청(본청 기술심사담당관)

○ 2018. 8. 24. : 제1234차 기술용역타당성 심사결과 통보

	[심 사 결 과]
- 사업비 조정 : 169,774천원 → 162,019천원(감 7,755천원, 감 4.57%) - 심사내용 ⦁노임인상율 (1.25%→1.2%)적용, 현지보조인부 보통인부 적용 등

○ 2018. 8. 25. : 시설물 정밀점검 용역 심사결과 제출(본부 시설관리과)

○ 2019. 3. 21. : 용역발주(예정)

○ 2019. 4. ~ 10. : 사업 착수, 준공 2개월전 자문회의 및 건설기술  심의위원회(본청 기술심사담당관) 심의

- 2019년 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행

※ 최소 준공 1개월 전에 건설기술 심의 이행(서울특별시 건설기술심의위원

조례 제3조 및 같은 조례 시행규칙 제6조내지 제7조

○ 2019. 11. : 용역 준공(용역 결과 보고 및 FMS 실적 입력)

- 안전진단 및 정밀점검용역 준공(완료)후 30일 이내 FMS 등록

□ 사업비

○ 예 산 액 : 162,019천원 (2018년 본청 심사평가액)

○ 설계금액 : 186,153천원

- 2019년 노임단가 및 현지보조인부 보통인부 적용

- ’18년도 시행한 정밀안전진단에서 누락된 내진성능 상세평가 배수지 (만리,능안,할미당) 3개소 대해 금회 실시

- 증액금액은 본부 포괄예산 사용예정

○ 예산과목 (가압장․배수지 등 시설물유지관리 - 상수도시설물안전진단)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 용역 계약방법

○ 정밀점검, 안전진단 전문용역 업체 계약 시행

○ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 사업수행능력평가기준 (PQ심사) 및 적격심사 대상

- 근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항 제2호〔별표4〕(2018.1.18.), 서울특별시 기술용역 사업수행능력 세부평가기준(2015.3.4.), 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행자부 예규 제19호, 2017.12.13.)

○ 낙찰자 결정방법

- 방법 : 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 참가 업체중 “사업수행능력 세부평가기준”에 의거 최고점수 획득업체

종합평점(100점)= 참여기술자(45점)+ 유사용역수행실적(25점)+ 신용도(10점)

+ 기술개발 및 투자실적(10점)+ 업무중첩도(10점)

※ 안전점검 및 정밀안전진단의 대가 근거 :『시특법』시행령 제8조 및 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침 (국토교통부고시 2018-45호, 2018.1.18.)

※ “안전점검 및 정밀안전진단의 대가”는 『시특법』제25조에 따라 설립된 한국 시설안전공단이 국토교통부장관의 승인을 받아 정한다. (시특법 시행령 제8조)

□ 정밀점검 및 안전진단 내용

○ 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

○ 기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력을 확인

○ 현장조사

○ 제반관련 시험실시 – 비파괴 현장 시험등

○ 시설물별 조사결과 분석

○ 종합적인 상태평가 : 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

- 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

○ 안전성평가

○ 정밀안전진단 및 정밀점검 결과 평가에 따른 보수, 보강방법 제출

□ 정밀안전진단 : 시설물의 결함 정도에 따라 조사․측정․시험, 구조계산, 수치해석 등을 실시, 분석․검토하여 안전성평가 결과를 결정하고. 또한 필요한 경우에는 구조물의 사용성, 내진성능등 평가결과 보수․보강이 필요한 경우에는 보수․보강방법을 제시

□ 정밀점검 : 시설물의 외관조사 및 측정․시험 결과와 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과의 상태평가 결과와 비교․검토하며 상태평가 결과를 결정 및 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야 한다.

○ 보수·보강 공법 및 개략 공사비 제시

○ 보고서 작성 및 기 타(유지관리 방안 제시)

Ⅲ				사 업 효 과
		c

□ 시설물의 안전성 확보 및 재난사고 예방

□ 점검결과에 따라 보수․ 보강 실시

□ 기능 유지 및 강화로 시민의 안정적인 급수

Ⅳ				행 정 사 항
		c

○ 2019년 상반기 배수지 청소일정과 병행 시행

○ 준공 2개월 전 자문회의 및 건설기술 심의위원회 심의

○ 시설물 정밀점검 용역준공 후 30일 이내 FMS 등록

붙임 : 1. 관련법규, 정밀점검 및 정밀안전진단 지침 각 1부.

2. 과업지시서 및 용역내역서 1부.

3. 과거 정밀안전진단 및 정밀점검 시행 현황1부. 끝.