문서번호	물순환정책과-2819
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
송종봉	강승곤	02/18 代김동완

2019년 녹사평역 주변

유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
서울특별시 계약심사업무처리규칙	기술심사담당관	기술용역 타당성 심사	적정
	안전감사담당관	일상감사	적정

2019. 2.

2019년 녹사평역 주변

유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역 시행계획

녹사평역 주변 유류오염 지하수의 외곽 확산을 방지하기 위해 전문기관을 통한 오염지하수 정화 용역을 시행하고자 함

□ 용역개요

❍ 용 역 명: 녹사평역 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 용역

❍ 위    치: 용산구 이태원동 34-2 일대(녹사평역 주변)

❍ 용역기간: 계약일 ~ 2019.12.17.

❍ 용 역 비: ************

❍ 예산과목: 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염 관리, 유류오염 정화 용역, 시설비

□ 추진현황(2019년)

❍ 2019년 용산미군기지 주변 유류오염 지하수 확산방지 및 정화 추진계획(’19.1.07.)

※ ’01.1월 녹사평역 주변 유류오염 지하수 발견 후 ’03.11월부터 정화용역 수행

❍ 기술용역 타당성 심사 요청(’19.1.22.): 물순환정책과 → 기술심사담당관

❍ 기술용역 타당성 심사결과 통보(’19.2.1.): 적정

❍ 일상감사 의뢰(’19.2.7.): 물순환정책과 → 안전감사담당관

❍ 일상감사 결과 통보(’19.2.15.): 1인견적 수의계약 적정

□ 계약방법

❍ 계약방법 : 1인견적 수의계약

❍ 계 약 자 : **************

❍ 수의계약 근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」   시행령 제25조 제1항 제8호 사목 및 제30조 제1항

- 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 1인견적 수의계약 가능

□ 주요 과업내용

❍ 지하수위 및 자유상유류 관측: 700회(20K지역 34공 × 2.3회/월 × 9개월)

❍ 지하수시료 채취 및 오염도 분석: 164점

분석대상 관측공		내 역	과업량	비고
계			164
19K 관측정	BH-24, BH-29(2공)	2공×2회(건기 1, 우기 1)	4
20K 관측정	BH-1~BH-16(16공)	관측공: 34공×4회(건기 2, 우기 2) 배경수질(BH-21): 1공×4회(건기 2, 우기 2)	140
	BH-34~BH-48(15공)
	BH-10-1, BH-12-1 BH-21, BH-37-1(4공)
양수정	PW-1~PW-4(4공) BH-6 인근(2공, 2019년 설치)	4공×4회(건기 2, 우기 2) 2공×2회(2019년 하반기)	20

- 분석항목(5개 항목) : 벤젠, 툴루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 석유계총탄화수소

❍ 자유상유류 수거 및 위탁 처리 : 24회(2공 × 1.2회/월 × 10개월)

❍ 오염지하수 양수 : 1,300톤(위탁 폐기처리)

❍ 자연저감능(전자수용체 분석) 평가

- 관측공(20k - 34공), 양수정(기존 - 4공)을 현장수질 항목(온도, 수소이온농도, 전기전도도, 산화환원전위) 및 전자수용체(용존산소, 질산염, 2가 망간, 철, 황산염) 분석을 각 4회 분석자료와 연계하여 자연저감도 평가

□ 추진일정

❍ 2019. 3.       : 용역 발주 및 계약

❍ 2019. 3.~12.17. : 용역 시행

- 2019. 7. 전문가 자문회의(용역추진 중간평가 및 자문의견 수렴)

- 2019.12. 전문가 자문회의(용역성과 최종평가 및 향후 추진방향 설정)

❍ 2019.12.17.: 용역 준공

붙임  1. 방침서 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 산출내역서 1부.

4. 수의계약사유서 1부.

5. 기술용역 타당성 심사결과 1부.

6. 일상감사 의견서 1부.  끝.