투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(구내방송설비) 납품기한 연기요청(돈화문 민요박물관 건립 통신공사)

우리 본부에서 시행 중인『돈화문 민요박물관 건립 통신공사□에 소요되는 관급자재(구내방송설비)를 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가.관급자재 변경내용

건 명	납품요구번호 (계약번호)	계약자	계약금액(원)	납품기한		비고
				당초	변경
구내방송설비	12-18-2-45731-00 (00177002701)	㈜에이디엠	22,801,000	`19.03.16.	`19.07.09.

나.연기사유 : 공사준공(2019.07.09.)에 따른 납품시기 미도래에 대한 연기

다.계약금액 및 수량 : 변경없음

라.지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 관급자재 구매의뢰 관련서류 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김진수		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/19 임정규
협조자
시행	설비부-2183	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)