문서번호	설비부-2220
결재일자	2019.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		여인웅	02/19 임정규
협조

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

관급자재 변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

도시기반시설본부

(설 비 부)

[중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사]

관급자재 변경 검토 보고

「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사」관급자재(수문)의 계약 변경 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

□ 공사규모 : 총인처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.46㎎/L) ⇒ 혼합방류 TP 0.46㎎/L

□ 공사기간 : 2017.11.27 〜 2020.1.26(2차 ‘18.10.10 ∼ ’20.1.26)

□ 공 사 비 : 2,393,136,000원(2차 1,618,136,000원)

□ 시 공 사 : 영풍진흥기업㈜

□ 감 리 사 : ㈜천일

2		검토내용

□ 계약 현황

· 품명및수량 : 수문류 6종(18대)

· 계약업체 : ㈜현대밸브

· 계약번호 : 00168306421(납품요구번호********76000)

· 계약방법 : 다수공급자 2단계경쟁

· 계약일자 : 2018.10.31

· 계약금액 : 210,350,140원

· 납품기한 : 2019.12.31

□ 변경사유 : 최초계약시 수량, 규격 표기 오류

□ 변경 상세 내용

품 명	규격	수량		단가(원)	금액(원)		비고
		당초	변경		당초	변경
제수밸브	φ200mm×0.98MPa 전동식, GCD450	2	2	3,898,440	7,796,880	7,796,880
수문	1.0×1.0m, 각형, 전동식, HDPE	12	12	7,301,000	87,612,000	87,612,000
수문	2.0×2.0m, 각형, 전동식, HDPE	1	1	21,442,400	21,442,400	21,442,400
수문	2.0×2.0m, 각형, 수동식, HDPE	1	0	15,118,460	15,118,460	0
수문	3.0×3.0m, 각형, 전동식, HDPE	1	2	43,100,400	43,100,400	86,200,800
수문	3.0×3.0m, 각형, 수동식, HDPE	1	1	35,280,000	35,280,000	35,280,000
소계		18	18		210,350,140	238,332,080

3		조치의견

□ 설계내역서와 계약내역서을 비교검토한 결과 규격 및 수량에 대한       수정이 필요하므로 총무부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.  끝.