문서번호	시설보수과-726
결재일자	2019.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이평주		02/19 임영철
협조	주무관		김종범
	주무관		김기수

“공용중인 도로시설물 인수․인계관련”

관련기관 합동회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  2.

시 설 보 수 과

“공용중인 도로시설물 인수․인계관련”

관련기관 합동회의 결과보고

공용중인 미 인수 시설물에 대한 사전점검 지적사항 등 미비점과 인수전 이행할 사전절차를 안내 인수․인계에 만전을 기하고자 함

□ 회의개요

○ 일    시 : 2019. 2. 14(목) 14:00~15:00

○ 장    소 : 동부도로사업소 본관 회의실(2층)

○ 참 석 자 : 22명

- SH공사(12) : 노명철부장 외 실무자 6명, 시공사 5명

- LH공사(3)   : 성경소장 외 실무자 1명, 시공사 1명

- 동부도로사업소(7명) : 시설보수과장 외 업무담당 6명

○ 회의내용

- 사전점검시 미 조치사항 조치일정 및 계획 협의

- 인수․인계 일정에 따른 인수․인계전 이행할 협조사항 안내

□ 회의결과

<시설물별 요구사항>

○ 공통사항

- 사전점검 지적사항에 대한 조속한 조치계획 및 조치시행

- 시설물별 인수․인계 계획서 제출(별첨 인수․인계 목록 참조)

- 유지관리 지침서 작성 사전 협의

○ 탄천우안도로 지하차도

- 점검지적사항 보수공사전 시공상세도 및 사용자재 품질시험 성적서 제출

○ 장지지하차도

- 인수․인계 제출목록 재협의 필요(붙임 회의자료 참조)

- 운영인력 투입(‘17.9.1)후 요구사항 조속한 조치

- 누수로 인한 결빙구간 방수공사 조속시행

○ 위례1지하차도

- U타입구간 시공중인 방음터널은 상부에서 점검 및 유지관리가  가능한 점검로 확보

- 파손된 충격흡수시설(위례방향 시점부)은 관련규정에 적합한 시설로 보수조치

<시설보수과장 협조요구>

○ 사전점검 미비점에 대한 조치 요구사항은 금번 실무협의를 통해 조치수준을 확정하여 인수․인계가 지연되지 않토록 조치

- 분야별(토목, 기계, 전기) 조치수준 업무담당별 안내

○ 위례1지하차도는 타기관(하남시)이 포함되어 있으므로 인수인계와 별도로 유지관리협약 등에 대한 협의가 필요함

- 서울시 관련부서(도로계획과, 도로시설과)와 조속한 협의필요

□ 향후계획

○ ‘19.2.~4.  시설물별 인수․인계 사전절차 추진

○ ‘19.4.~7.  시설물별 인수․인계

- ‘19. 4.  탄천우안도로 지하차도 인수․인계

- ‘19. 6.  장지지하차도 인수․인계

- ‘19. 7.  위례1지하차도 인수․인계

□ 행정사항

○ 회의결과 관련부서(기전과) 및 관련기관(SH,LH) 통보

붙임   1, 회의자료 1부.

2, 참석자 서명부 1부.  끝.