문서번호	건축부-2559
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장	시설국장		도시기반시설본부장
이수호	유현수	임인구	이택근		02/20 한제현
협 조

『에너지제로하우스 건립공사』

민사소송 상고 및 예비비 사용 계획

2019. 2.

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『에너지제로하우스 건립공사』

민사소송 상고 및 예비비 사용 계획

우리시를 상대로 제기한「에너지제로하우스 건립공사」공사대금 청구 사건의 판결 선고에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다.

Ⅰ		사 업 개 요

사 업 명 : 에너지제로하우스 건립공사

□ 위    치 : 서울 마포구 증산로 14(現 에너지드림센터)

□ 규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,762㎡

□ 주 용 도 : 폐기물처리시설(부대용도 : 녹색환경실천 전시관)

□ 공사기간 : 2009.12.18. ~ 2012.07.31.

□ 총사업비 : 21,566백만원

□ 감리사 / 시공사 : ㈜길종합건축사사무소 / ㈜대경건설(주) 외 1

□ 도급금액 : 17,475백만원(준공금액 17,322백만원)

Ⅱ		소 송 개 요

사 건 명 : *****************

□ 원    고 : 대경건설 주식회사, 합자회사 부기토건

□ 피    고 : 서울특별시

□ 사건개요 : 에너지제로하우스 건립공사 공사를 수행 하면서 물가변동, 설계변경, 공사기간 연장으로 인해 계약금액 조정사유가 발생하였다며 소 제기

***********************

□ 추진경위

- 2013. 12. 27. : 소장접수*******************

- 2013. 02. 08. : 답변서 제출

- 2013. 03. 11. ~ 2015.09.09. : 18차 변론 및 감정 진행

- 2015. 10. 21. : 판결선고

※ ********

************************************

**********************

- 2015. 11. 09. : 항소제기*******************

- 2016. 05. 20. ~ 09. 23 : 3차 변론 진행

- 2016. 11. 04. : 판결선고 기일(기일변경 : 관련사건 결과를 보기 위해)

- 2019. 02. 01. : 판결선고

- 2019. 02. 07. : 판결문 송달

판결내용

□ 판결주문 ******************************

- **************************************************************** 및 위 각 금액에 대하여 ‘12. 8. 1.부터  ’19. 2. 1.까지 연 6%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급, 원고들의 나머지 청구는 모두 기각

- 위 금액은 가집행 가능

- *******************************

□ 판결요지(판단이유)

- ***********************

․****************************

․*********************************

- ***********************

․*****************************

․**********************

․***********************************

- **************************

․******************************

․*******************************

- *****************

․****************************************************

Ⅲ		상 고 의 견

소송대리인 의견[변호사 곽창욱]

□ *******************************************************************************************************************

※ *******************************************************************************************

□ ************************************************************************

소송보조자 의견(도시기반시설본부)

□ *******************************************************

*********************

Ⅳ		판결금 지급

: 예비비 사용 계획

가지급 계획

□ ************************************

***********************************

□ ********************************************************

산출내역

【결정 금액】*******************

구 분	일 자	금 액(원)	비 고
***	***********	***********
****	************* ***********	***********	판결금에 대한 연 6% ********
	************* ***********	*********	판결선고일 다음날부터 연 20% *****
계		***********

□ **********************************************************

※ 예비비 근거 : 지방재정법 제43조(예비비), 시 재무회계규칙 제19조(예비비의 사용)

Ⅴ		행 정 사 항

우리본부 의견을 법률지원담당관 통보

□ 법률지원담당관에서 우리본부 의견을 참고하여 상고방침 수립 예정

원고측에 하자보수보증금 납부 또는 하자보수보증서 제출 요청 등 처리의견 조회

사업의뢰·운영부서(녹색에너지과, 환경정책과) 예산확보를 요청하여 예비비 확보 후 판결금 및 이자 등 예산 집행

붙 임 : 1. 판결문 1부.

2. 소송대리인(변호사) 의견서 1부.  끝.