문서번호	시설관리과-3084
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
김영민	代김영민	변재홍		02/20 代노석태
협 조	행정지원과장		노석태
	행정관리팀장		김효선

- 중앙제어실 통합감시시스템 구축 -

추 진 계 획 보 고

2019. 2

북부도로사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

중앙제어실 통합감시시스템 구축 추진계획 보고

노후된 중앙제어실 통합감시시스템 교체 및 재배치를 통한 감시제어설비의 신뢰도 향상 및 효율성을 제고하여 안정적인 아리수 공급 및 최적의 근무환경을 조성하고자 함.

1				추 진 근 거

□ 2019년 기전설비 유지관리 추진계획 : 시설관리과-1720(2019.01.28.)

2				시 설 현 황

□ 위    치 : 사업소 별관 1층

□ 감시대상 : 50개소(아리수올림터 8, 배수지 8, 증압장 34)

□ 시설년도 : 2005년 12월(제어설비 개량 2010년 7월)

□ 근무인원 : 16명(4조 2교대 근무자 8명, 시간선택제 5명, 수리반 3명)

□ 설비현황

❍ PC 및 모니터 : 8대(설비감시 4대,영상․유량․수질․행정 PC 각 1대)

❍ 대형 모니터 : 감시용 8대(46인치), CCTV 3대(52인치)

❍ 통신서버 : 모뎀, ETOS, KT통신서버, 본부서버, 전산서버 등

❍ 기타 1식 : 배전반 및 UPS

3				사 업 개 요

□ 사업내용

사 업 명	규 모	사업비(백만원)
중앙제어실 통합감시시스템 제작구매 설치	운영 S/W, PC, 모니터 교체 및 재배치 1식	270

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

4				세부추진 계획

□ 발주방법 : 지명경쟁입찰

❍ 관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제20조(제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등) 동법 제22조(지명입찰에 의한 계약)

❍ 지명경쟁입찰 사유

24시간 안정적인 아리수 공급을 위한 중요한 설비임을 감안 성능이 보장된 신뢰성 높은 품질 확보 및 향후 원활한 A/S, 유지관리를 위한 최상의 시스템 구축 필요

❍ 지명경쟁입찰 업체 선정 추천 조건

지명업체 선정은 “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률 제15조”에 의한 직접생산증명서를 소지한 우수업체를 한국계측제어공업협동조합으로부터 5개 이상 추천받아 추진

- 직접생산증명서를 소지한 업체

- 정보통신공사업 면허를 소지한 업체

□ 단계별 조치 계획

❍ 1단계 : 별관 1층 중앙제어실 → 별관 3층 강당 임시이전 운영

❍ 2단계 : 별관 1층 중앙제어실 제작 구매 장비 설치 구축 및 운영

❍ 3단계 : 별관 3층 강당 기존 제어설비 철거

5				추 진 일 정

❍ 현장조사 설계 : 2019. 02. 20 ~ 3. 15

❍ 계약심사 요청 : 2019. 03. 15

❍ 구매설치 발주 : 2019. 03. 30

❍ 계약 및 착수 : 2019. 04. 15

❍ 납품 및 준공 : 2019. 10. 30

6				행 정 사 항

❍ 행정지원과장은 제어실 임시 이전(1단계) 및 철거(3단계) 관련          제어실 공간 확보, 체육시설 이전 및 재배치 등 조치 요망

❍ 또한, 제어실 임시 이전 사용기간(착수일로부터 약 2개월간) 중        제어실 근무자 외 출입 불가함을 이용자들에게 안내하기 바라며,          현장 여건상 사용기간 연장될 시 별도 협의 예정

끝.