문서번호	계약심사과-13735
결재일자	2018.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
설상운		류종기	08/22 안호
협 조
	건축심사팀장			서홍일
	설비심사팀장			최주용

시청역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계 설계VE·공사원가 통합심사 실행계획

2018. 8.

시청역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계

설계VE·공사원가 통합심사 실행계획

서울교통공사 건축처에서 시행하고 있는「시청역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사」실시설계에 대해 심사전담팀을 구성하고, 설계VE·공사원가 심사 계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

2		심사개요

□ 신청부서 : 서울교통공사(건축처)

□ 용  역  명 : 시청역 외 1역 내진보강 시설물 이설공사 실시설계

□ 위    치 : 시청역(2호선)/지하3층, 양천구청역/지하2층

□ 사업내용 : 건축마감재 및 각종 설비 시설물의 철거·이설 및 신설

- 공사규모 : 시청역(2호선) 12,561㎡, 양천구청역 5,103㎡

□ 공 사 비 : 46,000백만원

□ 용역기간 : ’18. 6. 14. ~ ’18. 10. 11.

□ 설계공정률 : 80%

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 시설이용자, 유지관리부서 포함 21명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVP) 이재성 ㈜무한리더스 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 설상운 주무관 계약심사과	총괄 및 결과보고서 정리
팀원(11명)	▸ 외부 전문가 4명 - (건축구조) 정행철 위원 대우조선해양건설 - (정보통신) 권규철 위원 테크뱅크 - (전 기) 박병수 위원 은세기술 - (기 계) 김대환 위원 ㈜유 신 ▸ 내부 공무원 3명 - (건 축) 박태욱 주무관 계약심사과 - (전 기) 황문연 주무관 계약심사과 - (기 계) 김경일 주무관 계약심사과	기능 분석 기술 검토 아이디어 제안 아이디어 평가 제안서 작성 공사원가 분석, 정리 등
발주부서	▸ 한용진 과장 서울교통공사 건축처	시설이용자 요구사항 설명
유지관리부서	▸ 우명근 부장 서울교통공사 건축1사업소	사업설명, 제안서 검토
설계자(8명)	▸ 정재욱 소장 ㈜다보건축 외 ▸ 분야별 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’18.8.21		설계경제성 심사 신청 (사업부서)		▸심사 신청서 접수
		’18.8.22		설계VE․공사원가 통합심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 공 사 원 가 통 합 심 사 운 영		’18.9.13 ~ ’18.9.20 (4일차~11일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 및 사업설명 ▸1,2차 검토회의 - 아이디어제시, 결과이행 회의 - 설계도서(예산서) 형식 검토 ▸최종 검토회의 : 의사결정
		’18.9.21 (12일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸VE 제안서 통보
		’18.10.8 ( 29일차)		설계도서 수정 및 제출 (사업부서 → 계약심사과)		▸제안서를 반영하여 설계도서 수정
		’18.10.9 ~ ’18.10.17 (38일차)		공사원가 심사 (계약심사과)		▸분야별 원가심사 ▸설계VE 결과보고서 작성
		’18.10.18 (39일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보

□ 설계VE․공사원가 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’18.9.13(목) 10:00~17:00	- 현장답사 및 1차 검토희의 :기능분석·정리 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’18.9.14(금) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’18.9.20(목) 10:00~17:00	- 최종검토 회의 : 대안 채택여부 결정 ‣ 장소 : 계약심사과 內 회의실
’18.9.21(금) 18:00 까지	- VE 제안서 통보 (계약심사과 ⇒ 사업부서)
’18.10.8(월) 18:00 까지	- 설계도서 수정 및 제출 (사업부서 ⇒ 계약심사과)
‘18.10.17(수) 18:00 까지	- 공사원가심사 완료
’18.10.18(목) 18:00 까지	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 천원

○ 외부전문가 수당 :  9,123천원

— 리더(기술사+보고서작성)   :  2,449천원(2,449천원 × 1명)

— 위원(기술사)                :  4,528천원(1,132천원 × 4명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) :  1,646천원(823천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 예산과목

○ 신청부서(교통공사 건축처)에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보  -----  ’18.10.18(목)

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.