문서번호	도시철도과-1773
결재일자	2019.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도시철도안전팀장	도시철도과장	교통기획관		도시교통실장
박석진	김재창	박진순	이원목		02/20 고홍석
협 조

『우장산역 외 2개역』

출입구 추가설치 타당성조사용역 시행계획

2019. 2.

도 시 교 통 실

(도 시 철 도 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『우장산역 외 2개역』

출입구 추가설치 타당성조사용역 시행계획

지하철 역사 주변 개발 등 주변 여건 변화로 지하철 이용편의증진을 위한 출입구 신설 요구가 높아짐에 따라, 재정 투입 이전 사업의 타당성을 사전 검증하고, 한정된 지방재정의 효율적이고 계획적인 운영을 도모하고자 함.

□ 추진근거

○ ’19년 예산 편성 : 200백만원***********************

- 지하철 역사 주변 재개발 등 여건 변화로 지하철 이용편의를 위한 지역주민들의 지하철 출입구 신설 요구반영

□ 타당성조사 대상 및 현황

○ 우장산역(5호선)

- 위치 : 강서구 내발산동 - 역사구조 : 지하2층(상대식) - 출입구 : 4개소 - 승·하차인원 : 일평균 31,033명	검토위치

○ 광나루역(5호선)

- 위치 : 광진구 광장동 - 역사구조 : 지하3층(상대식) - 출입구 : 4개소 - 승·하차인원 : 일평균 27,546명	검토위치

○ 아차산역(5호선)

- 위치 : 광진구 능동 - 역사구조 : 지하3층(상대식) - 출입구 : 5개소 - 승·하차인원 : 일평균 29,614명	검토위치

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 우장산역 외 2개역 출입구 추가설치 타당성조사 용역

○ 용역위치 : 우장산역, 광나루역, 아차산역(5호선)

○ 사업예산 : 200백만원

○ 용역기간 : 착수일로부터 210일(7개월)

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(실적제한)

○ 과업내용 : 세부내용 과업설명서 참조

- 우장산역 : 우장산역 교차로 방향 출입구 신설

- 광나루역 : 광장동 체육시설부지 방향 출입구 신설

- 아차산역 : 아차산역 삼거리 방향 출입구 신설

□ 향후계획

○ ’19.  2.       : 기술용역 타당성심사(용역발주심의)

○ ’19.  3.       : 용역발주 및 계약

○ ’19.  4.~10. : 용역 시행

○ ’19. 11.      : 용역 준공

붙임 : 1. 과업설명서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 위치도 1부.  끝.