투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 계약의뢰(중랑물재생센터 총인처리시설 기계공사 수문 구매) 2단계경쟁

우리부에서 시행 중인『중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』관급자재에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경계약 내용

(단위 : 원)

품목		계약금액				계약기한	납품요구번호	계약번호
		품대	조달수수료	소계	증,감
수문 밸브	변경전	210,350,140	1,079,090	211,429,230	증)28,189,840	’19.12.31	12-18-1-82760-00	00168306421
	변경후	238,332,080	1,286,990	239,619,070		변경없음

나. 변경사유 : 계약물량 변경

라. 예산과목 : 자본적지출, 비가동설비 자산취득, 건설중인 자산, 시설비 및 부대비,시설비(중랑물재생센터 총인처리시설공사)

마. 계약업체 : ㈜현대밸브, 대표 최호정

붙임 1) 관급자재 변경 검토 보고서 1부.

2) 물품구매요구서 1부.

3) 합의각서 및 당초계약서 각 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	02/20 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-2255	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)